문서번호	설비부-3700
결재일자	2021. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		오삼록	03/22 代여인웅
협조

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

관급자재(무대조명,무대장치) 납품기한 연장 검토 보고

2021. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

관급자재(무대조명,무대장치) 납품기한 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』관급자재(무대조명,무대장치) 납품기한 연장에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사

○ ***********************************

○ ******************************************

○ **********************************************************

○ *********************************************

○ ***********************

○ ***********************************

Ⅱ		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2.계약기간의 연장)

○ 전기공사 관급자재 납품기한 연장 검토 보고[시립CM제2021-75호 ('21.03.19.)]

Ⅲ		검토내용

○ 관급자재 계약현황

계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약건명	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
*************	********	**** ****	**	***********	**********	***********
*************	*********	**** ****	**	***********	**********	***********

○ 변경사유 : 전기공사 기간 연장에 따른 관급자재 납품기한 연장

○ 건설사업관리인 검토의견

- 전기공사 기간 연장에 따라 공정에 맞춰 관급자재 납품기한을 연장하는 것이 적정하다고 사료됨

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 전기공사 관급자재의 납품기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.