문서번호	총무과-2981
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	백제학연구소장	한성백제박물관장		문화본부장
윤수희	조영훈	김기섭		03/23 유연식
협 조	역사문화재과장		권순기
	한성백제팀장		오정숙
	총무과장		임석진
	전시기획과장		김영심
	교육홍보과장		이경자

｢풍납동토성박물관｣(가칭)

건립지원 기획팀 운영 계획(2차)

2021. 3.

한성백제박물관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□	제5호

｢풍납동토성박물관｣(가칭)

건립지원 기획팀 운영 계획(2차)

｢풍납동토성박물관(가칭)｣ 건립사업(현재 문화본부 역사문화재과 추진중) 관련, 전시․교육․유물관리 등 콘텐츠 기획 및 운영 지원을 위해 박물관 내 건립지원 기획팀을 운영하고자 함

※ ｢풍납동토성박물관(가칭)｣ 준공 후 한성백제박물관 분관으로 운영 예정

1		풍납동토성박물관 건립사업 개요

❍ 위    치 : 서울특별시 송파구 풍성로 14길 45(현 서울창의마을 풍납캠프)

❍ 규    모 : 대지면적 16,733㎡, 건축연면적 5,501㎡(2개동)

❍ 사업내용 : 풍납동토성(사적 제11호) 유적 현장박물관 조성

❍ 사업기간 : ’19.3월 ~ ’23.12월

❍ 총사업비 : 29,215백만원(토지비 제외)

❍ 추진공정 및 현황

부지 확정		타당성 조사		투자 심사		건축기획 사전절차		설계공모 기본․실시설계				공사		개관
’18.7월		’20.1~5월		’20.7~12월		’21.2~5월		’21.5~’22.2월				’22.3월~ ‘23.11월		’23.12월
완 료						추진중

〔사업부지 위치도〕

현재 건물명		기능별 배치 시설	연면적(㎡)	운영주체
가동	(지하1, 지상5)	풍납동토성박물관	5,501	서울시 (한성백제박물관)
식당동	(지하1, 지상2)
나동	(지하1, 지상4)	서울역사도서관	2,256	서울시 (서울역사편찬원)
연구소동	(지상3)	풍납동토성 발굴조사단	1,271	문화재청 (국립강화문화재연구소)
다동	(지하1, 지상5)	주민편의시설 및 도시재생지원센터	4,101	송파구
상가동	(지상1)

〔사업부지 내 시설 배치안〕

〔사업부지 건물 현황도〕

2		건립지원 기획팀 추진경위 및 성과(1차)

□ 추진경위

❍ ｢풍납동토성박물관｣(가칭) 건립지원 기획팀 구성․운영 계획 수립 : ’19.12.3.

❍ 문화본부 역사문화재과(한성백제팀)와 협업 TF 구축	: ’20.1.22.

❍ 문화체육관광부 공립박물관 건립타당성 사전평가 공동 수행 : ’20.1.~4.

- 공립박물관 설립타당성 사전평가 신청서 초안 마련 및 설립협의 (’20.1.)

- 공립박물관 설립타당성 사전평가(1~3차) (’20.1.~4.)

▸ 신청서 제출(1.30.) → 1차서면평가(2.10.~3.13.) → 2차현장평가(4.2.) → 3차최종심의(4.24.)

▸ 최종 결과 통보 ‘적정’(5.7.)  ※ 총 13개관 신청하여 최종 3개관 선정

❍ 행정안전부 중앙투자심사 보완자료 작성 협조	: ’20.7.~11.

- 풍납동토성 출토유물 확보, 박물관 운영수지개선 방안 마련 등 보완자료 작성

□ 추진성과

❍ 문화본부 역사문화재과와 협업으로 풍납동토성박물관의 기본계획(안) 마련

- 미정리된 풍납동토성 출토유물자료 관리현황 총정리

- 백제왕성유적 현장박물관으로서 특화된 전시․교육 운영 프로그램(안) 마련

❍ 문화본부 역사문화재과와 긴밀한 협조체계 구축·운영으로 풍납동토성박물관 설립타당성 사전평가(1~3차) 절차를 최단기간에 통과, 법률적․정책적․기술적 ‘적정’사업으로 최종 선정

❖ 풍납동토성박물관 건립사업 역사문화재과-한성백제박물관 협력사항(’20년)
□ 역사문화재과(한성백제팀) - 박물관 건립 기본계획 수립 - 박물관 설립협의 및 사전평가(문체부) 절차 추진 - 중앙투자심사(행안부) 절차 추진 - 설계공모 사전절차 및 대외기관 협업 추진 등	□ 한성백제박물관(건립지원 기획팀_1차) - 박물관 공간설계 기본방향 및 설계도면 제작 지원 - 전시 기본방향 및 세부구성·연출 - 교육프로그램 기획 및 국내외 콘텐츠 벤치마킹 사례조사 - 풍납동토성 출토유물 목록화 및 전시자료 수집 등

	풍납동토성박물관 건립사업 추진공정 단축 및 사업 본격화의 기반 마련

3		건립지원 기획팀 구성·운영 계획

□ 추진 방향

❍ 풍납동토성박물관 건립사업의 성공적 추진을 위한 콘텐츠 기획 지원

❍ 풍납동토성박물관의 건축설계․시공 등 건립 추진공정 지원

❍ 풍납동토성박물관 전시․교육 및 유물 수집․관리 프로그램 기획

❍ 유물․자료 수집·관리 관련 업무 경험이 풍부한 학예인력으로 팀 구성

□ 인원 구성

❍ 총 4명 : 학예연구관 1명, 학예연구사 3명

분 야	성 명	소 속	직급
총 괄	*****	******	학예연구관
전시, 교육	*****	**********	학예연구사
전시, 유물	*****	*****
전시, 교육	******	*****

□ 운영 방법

❍ 운영 기간: ’21.1.~  ※ 추진 상황에 따라 인원ㆍ기간 변동

❍ 회의 개최: 격주 1회 및 필요 사안 발생시

- 구성원 간 추진상황 공유 및 목표관리 체계 유지

□ 추진 업무

❍ 풍납동토성박물관 공간 설계 및 전시 등 학예 분야 업무 협조

- 전시: 박물관 공간 설계, 전시 기본방향, 세부 구성ㆍ연출, 옥외 전시물 등

- 교육: 교육프로그램 기획, 국내외 콘텐츠 벤치마킹, 옥외 행사프로그램 등

- 유물: 수장공간 기획, 풍납동토성 출토유물 목록 작성, 유물대여 기관 협의 등

- 조사: 전시자료 및 발굴성과, 지역현황자료 조사 등

❍ 현 사업추진 부서인 역사문화재과(한성백제팀)의 지원 요청에 따른 자료 작성, 보완

- 건축관련 기본자료 보완: 풍납동토성박물관 리모델링 설계공모지침서ㆍ과업내용서 등 자료 보완

- 건축설계 보완: 풍납동토성박물관 건축설계 및 외부공간 조성 분야 자료 보완

- 시공 및 전시물 협의: 풍납동토성박물관 건축시공 및 내부 전시물 제작설치시 조정 업무, 옥외 전시물ㆍ옥외 행사프로그램 연계 업무, 전시ㆍ유물수집ㆍ교육ㆍ문화행사 운영방안 수립 업무 등

□ 운영 일정

❍ 건축기획 사전절차 단계(’21.2.~5.)	: 설계공모지침서, 과업내용서 검토

❍ 설계공모, 기본․실시설계 단계(’21.5.~’22.2.): 건축설계, 전시설계 등 검토

❍ 공사 단계(’22.3.~’23.11.)	: 건축시공, 전시물 제작·설치 검토 협의

4		행정 사항

❍ 인력 배치: 총무과, 전시기획과, 교육홍보과, 백제학연구소

- 기존 업무 외 업무 분장에 추가하여 지원 기획팀 업무 공식화

❍ 운영기간 중 필요에 따라 팀원 간 업무는 탄력 조정.  끝.