문서번호	공원시설과-1726
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이병철		양돈욱	03/23 김상국
협 조

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 - 실정보고서(작업구 재포장 등) 검토 보고

2021. 3.

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(작업구 재포장등) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「광나루 잠원 수영장 노후상수관로 교체공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 서울시설공단 공사감독1처-1705( ̓̕21.3.22.) : 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사

○ 대    상 : 광나루, 잠원수영장

○ 공사기간 :  ̕20. 7. 6. ～ 21. 5. 30

○ 공사주요 내용

- 상수관로 교체 : 3,449m,

- 보도블록 포장 : 21,822㎡

- 화강판석 설치 : 364㎡

- 기타 관로용접 등 1식

○ 도 급 비 : ****************

***************************************

○ 계 약 자 : ********************

○ 감독기관 : ***************

□ 실정보고 내용

▶ 콘크리트 재포장

○ 잠원수영장 수조둘레 작업구 상부에 콘크리트 포장이 되어 있으나, 콘크리트의     깨짐 들뜸 현상으로 인하여 철거후 재 시공이 필요함.

-당초 : 콘크리트(면적1,036㎡, 두께 70mm) - 균열, 파손

○ 기존 콘크리트 철거후 강도 확보를 위하여 와이어메쉬 및 레미콘 타설(100mm)

-변경 : 레미콘 타설(면적 1,036㎡, 두께 100mm, 와이어메쉬)

▶ 작업구 출입문 교체

○ 잠원수영장 작업구 출입문(철재 1.0×2.4) 설치되어 있으나 휨 변형 및     부식으로 교체 필요

- 당초 : 철재(1.0×2.4) : 12 개소

- 변경 : 스테인레스(1.0×2.4) : 12개소

○ 변경 세부내역

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 변경 금액 : 51,674천원(증)

□ 검토 결과

○ 시설공단으로부터 제출받은 검토보고서에 대하여 검토한 결과 도막형바닥재 시공전 콘크리트 균열 들뜸에 의한 향후 지속적인 파손 방지를 위한 콘크리트재타설 및 노후된 작업구 출입문의 교체는 적정한 것으로 판단됨

□ 조치 계획

○ 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 추진 중 시설관리공단에서 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 우선 시공 조치하고 추후 설계변경에 차질없도록 서울시설공단에 통보

붙임 : 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.  끝.