문서번호	정수시설과-822
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
윤기영		김기윤	03/23 代이혜진
협조

2020년 구의아리수정수센터 토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사)

설계변경 심의결과 보고

2021. 3.

구의아리수정수센터

2020년 구의아리수정수센터 토목건축시설물 정비공사(장기계속공사)

설계변경 심의결과 보고

토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사) 시행 중 물량의 증·감 및 신규공정에 대한 설계변경 심의를 실시하고 결과를 보고 드림.

1		사업현황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사

○ 공사기간 : 2020. 4. 7. ~ 2021. 3. 31.

○ 계 약 자 : ㈜금성아트 대표 장윤현

○ 계약금액 : ************

○ 공사규모

- 토공 : 콘크리트포장절단(100~150㎜)외 19종

- 구조물공 : Con’c인력비빔타설(소형구조)외 32종

- 부설공 : 잡철물 제작 설치(간단100%)외 33종

2		설계변경 사항

□ 주요 변경내역

○ 토공[콘크리트포장절단(100~150㎜) 외 19종]

- 변경내역 없음

○ 구조물공[Con’c인력비빔타설(소형구조) 외 32종]

- 1정수장 여과지 타일 보수에 따른 시공물량 증·감

○ 부설공[잡철물 제작 설치(간단100%)외 39종]

- 송수펌프동 전기실 유리교체에 따른 시공물량 증·감 및 신공종 발생

- 1정수장 여과지 목재계단 파손 교체에 따른 신공종 발생

- 2정수장 여과지 옥상배수관 보수에 따른 시공물량 증·감 및 신공종 발생

- 정문 방호실 창고 처마 물받이 및 배수 홈통 설치에 따른 시공물량 증·감 및 신공종 발생

□ 총괄 변경내용

❍ 세부 물량 및 금액변경 사항: 붙임 내역서 참조

❍ 변경내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증·감액
1차수 금액	***********	************	-
2차수 금액	**********	**********	*********
총부기금액[도급액]	***********	***********	*********

3		심의결과

□ 설계변경의 타당성: 타당

□ 증·감 물량 및 제잡비 산정과 적용 적정성 여부: 적정

□ 각종 제반규정 준수 여부: 준수

□ 신규공정 낙찰율 적용 여부: 적용

4		조치의견

□ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.