투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰[마곡산업단지 공공산업지원시설 통신공사-총차, 2차1회]

우리 본부에서 시행 중인「마곡산업단지 공공산업지원시설 통신공사」와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 마곡산업단지 공공지원시설 통신공사(총차, 2차1회)

나. 계 약 자 : 샘정보통신㈜ 대표 이용우 / ㈜엑사엔시스 김준용

다. 계약변경 내용

구 분	공 사 기 간		비 고
	당 초	변 경
총 차	2018.08.20. ~ 2021.10.20.	변 경 없 음
2 차	2019.12.17. ~ 2021.03.31.	2019.12.17. ~ 2021.07.31.	122일 (증)
도급비	총차 : 금 1,290,272,000원 2 차 : 금 555,838,000원	변 경 없 음

라. 예산과목 : 지역발전본부서남권사업과, 첨단R&D단지조성및도시재생, 신성장경제거점마곡R&D 클러스터조성, 마곡산업단지 공공산업지원시설건립,시설비및부대비 시설비

마. 변경사유 : 의뢰부서(서남권사업단)의 관리운영방안 재수립으로 사업규모 변경에 따른 설계변경 요청으로 건축공정에 맞춰 통신공사(2차) 공기연장(122일)

붙임   1. 공사연기 보고서 1부.

2. 합의서 및 공사예정공정표  각 1부  끝.

	설비부장
주무관	백남진		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	전결 03/23 代여인웅
협조자
시행	설비부-3784	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)