투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	경기도 김포시 고촌읍 신곡로 29번길 35 삼풍종합건축사사무소
(경유)
제목	기술용역[선유도 보행잔교 조성 기본 및 실시설계용역] 과업내용 변경 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 계약 체결하여 시행중인 「선유도 보행잔교 조성 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 아래(붙임)와 같이 과업내용이 변경됨을 알려드립니다.

3. 변경 과업내용에 따라 현재 진행 중인 기본 및 실시설계는 잠정 중단하고, 투자심사를 위한 타당성 조사 등 심사절차를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 관련근거

1) 과업내용서 1.15.(과업내용의 변경 조건) 및 1.16.(설계변경 등)

- 지자체 및 관계기관의 협의, 발주기관의 계획의 변경된 때

- 과업 수행 중 발주기관의 계획변경으로 인한 과업내용 변경이 있는 경우

2) 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건

- 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정 제6절 제1호 가목

나. 변경사항

1) 기본 및 실시설계 과업은 투자심사 완료시까지 잠정 중단

2) 투자심사를 위한 타당성 조사 및 심사 절차 수행 등 과업 추가

붙임  과업내용서(추가) 1부. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	이호연		치수과장	전결 03/19 최연호
협조자
시행	치수과-1827	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)