“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)_2차수)

1. 정수시설과-1953(2021.03.18. 변경계약 의뢰) 호와 관련입니다.

2. 「2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)_2차수」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약 체결되었음을 보고(통보) 합니다.

가. 계 약 명 : 2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)_2차수

**********************************

다. 변경계약일자 : 2021. 03. 18.

라. 변경내역(계약금액)

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 ․ 감액(원)
총공사부기금액	74,677,930	73,350,000	△1,327,930
금차계약금액(2차수)	14,677,930	13,350,000	△1,327,930

마. 변경사유 : 계약물량 증‧감 및 신규공종 발생에 따른 물량 변경

붙임 : 공사변경계약서 1부.  끝.

주무관	김효영		행정관리과장	박진기		뚝도아리수정수센터소장	03/19 최규동
협조자
시행	행정관리과-2970	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가 642-1)	/
전화	3146-5512	/전송	3146-5508	/	khy5912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)