문서번호	도로보수과-2724
결재일자	2021. 3. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		윤옥광	03/22 김영철
협 조
	주무관			이상하

「‘20/’21 제설작업 용역(장기계속)」

설계변경(2차분) 검토보고

2021. 03.

서부도로사업소

(도로보수과)

「‘20/’21 제설작업 용역(장기계속)」

설계변경(2차분) 검토보고

우리 사업소에서 시행하는 『‘20/’21 제설작업 용역(장기계속)』과 관련하여 ‘21.03.15.일자로 제설대책기간이 종료됨에 따라 제설작업 용역 설계변경(2차분)을 검토하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진근거

□ 2021년 상반기 제설대책 추진 예산 재배정 알림

○ 도로관리과-894(‘21.01.18.)호

□ 2021년 제설대책 추진 예산 재배정 알림

○ 도로관리과-4669(‘21.03.22.)호

Ⅱ		용역개요 및 예산현황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ‘20/’21 제설작업 용역(장기계속)

○ 용역기간 : ‘20.11.15.~’21.03.15.(121일)

*********************************************************************

○ 용 역 비 : 금 298,249,700원

*********************************************

○ 계 약 자 : **************

□ 예산배정현황

(단위 : 천원)

예산과목		예산액	배정일
도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,제설대책추진,사무관리비	제설작업 용역비, 급량비 및 물품구매	182,000	‘21.01.18.
		127,000	‘21.03.22.

Ⅲ		변경내용 및 조치계획

□ 설계변경 사유

○ 비상근무 발령 및 결빙대비 대기에 따른 공정별 물량 증ㆍ감 정산

- 비상발령 횟수 : 총 31회(보강 13회, 1단계 13회, 2단계 5회, 제설작업 13회)

▸ 1차분 : 총 3회(보강 2회, 1단계 1회, 2단계 0회, 제설작업 2회)

▸ 2차분 : 총 28회(보강 11회, 1단계 12회, 2단계 5회, 제설작업 11회)

- 결빙대기 횟수 : 총 1회

- 2차분 공정별 물량 증ㆍ감 현황

공종	규격	단위	변경내역				비고
			당초	변경	증ㆍ감
상황반장	주간	hr	-	227.5	증	227.5
	야간	hr	30.0	106.0	증	76.0
상황대기원	야간	일	74.0	74.0	-
제설작업원	주간	hr	7.0	433.0	증	426.0
	야간	hr	61.0	212.0	증	151.0
제설작업운전원	주간	hr	20.0	1,004.5	증	984.5
	야간	hr	100.0	530.0	증	430.0
제설장비 상시대기	덤프(15톤)	hr	-	-	-
제설작업	덤프(15톤)	hr	-	-	-
제설장비 상시대기	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	93.5	204.5	증	111.0
제설작업	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	0.0	119.0	증	119.0
덤프트럭(월임대)유류비		hr	43.0	748.0	증	705.0
제설 상황실	3[eqn: m]*9[eqn: m]	동	1	1	-
덤프트럭 월임대	15톤 덤프	월	2.5	2.5	-

※ 1차 정산분 이후 ’20.12월 비상근무로 발생된 용역비 정산금액을 2차분에 포함하여 정산처리

○ ‘21.01.07. 폭설로 인한 긴급 제설작업으로 용역사에서 직영 제설차량 및 살포기에 대하여 주유한 유류비를 실정산

※ 직영 제설차량 및 살포기의 경우, 사업소에서 자체 주유가 원칙

□ 사업비 변경내용

공 종	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
*****	***********	***********	*************
*****	***********	***********	*	****
*****	***********	***********	*************

□ 조치계획

○ 상기 검토보고 내용과 같이 비상근무 발령에 의거 공종별 실제 근무한 사항 및 직영 제설차량 및 살포기 유류비에 대하여 정산을 실시하고 그 결과를 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 1. 예산재배정 공문 2부.

2. 설계변경내역서(총차분, 2차분) 2부.  끝.