투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경(최종) 시행 및 변경계약 의뢰[’20/’21년 제설작업용역(장기계속)]

우리부서에서 시행중인 『’20/’21년 제설작업용역(장기계속)-동부』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명: ’20/’21년 제설작업용역(장기계속)-동부

2. 용역기간: ’20.11.16.~’21.3.31.(2차분 ’21.1.1.~’21.03.31.)

3. 도 급 자: *************

4. 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증 ․ 감	비 고
총 차 분	***********	***********	************
1 차 분	***********	***********	*	기 준공
2 차 분	***********	***********	************

5. 변경사유: 제설대책 비상발령 등에 따른 실근무 정산

6. 예산과목

도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 사무관리비

붙임 1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경(최종) 내역서 1부.

3. 합의각서 2부.  끝.

	도로보수과장
주무관	이석연		도로보수과장	03/22 호경수
협조자	주무관	송광석		주무관	장인숙
시행	도로보수과-2794	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0344	/전송		/	wartry@seoul.go.kr	/	부분공개(5)