코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제목	85. 금천소방서 감염관리실 설치일정 제출(구로)

1. 市 소방행정과-6580(2021.3.18.)호「금천소방서 감염관리실 설치일정 제출 요청」와 관련입니다.

2. 금천소방서가 2021년 9월 준공예정으로 금천소방서 부속시설인「감염관리실 설치」추진일정을 다음과 같이 제출합니다.

○ 추진일정

연번	기간	추진내용	비 고
1	`21.07.01. ∼ `21.07.02.	기본계획 수립
2	`21.07.05. ∼ `21.07.09.	구매계약 심사
3	`21.07.09. ∼ `21.07.11.	사전규격 공개
4	`21.07.12. ∼ `21.07.16.	입찰공고
5	`21.07.20. ∼ `21.07.21.	제안서 평가
6	`21.07.22. ∼ `21.07.28.	계약의뢰(재무과), 계약체결
7	`21.08.02. ∼ `21.08.27.	공사시작, 준공

	구로소방서장
담당자	김형국		구급팀장	양해영		재난관리과장	03/23 우성삼
협조자
시행	재난관리과-1983	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 3층 재난관리과 (고척동)	/
전화	02-2618-8119	/전송	02-8618-3109	/	r*********@seoul.go.kr	/	부분공개(5)