투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	'20/'21 제설작업 용역-서부(장기계속) 설계변경(2차분) 시행 및 계약 의뢰

1. 도로보수과-2724(2021.03.22.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『‘20/’21 제설작업 용역-서부(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차분 정산) 시행코자 하며, 그에 대해 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : ‘20/’21 제설작업 용역-서부(장기계속)

나. 용역기간 : 총차분 2020.11.13. ~ 2021. 03. 31.

(2차분 2021.01.01. ~ 2021. 03. 31.)

************************************************

**********************

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
*******	***********	***********	*************
*****	***********	***********	*************
*****	***********	***********	*	기정산
*****	***********	***********	*************

바. 설계변경 사유

- 비상근무 발령 및 결빙대비 대기에 따른 2차분 공정별 물량 증ㆍ감 정산

- ‘21.01.07. 폭설로 인한 긴급 제설작업으로 용역사에서 직영 제설차량 및 살포기에 대하여 주유한 유류비를 실정산

사. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비****************

붙임 1. 방침서 1부

2. 설계변경내역서(총차분, 1차분) 2부

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
★주무관	정의현		도로보수과장	윤옥광		서부도로사업소장	03/23 김영철
협조자	주무관	장재영		주무관	이상하		관리단속과장	박성주
시행	도로보수과-2756	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8355	/전송		/	jam0215@seoul.go.kr	/	부분공개(6)