문서번호	기반시설과-1967
결재일자	2021. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장		한강사업본부장
양정훈	라철흠	박상보		03/24 신용목
협 조
	기획예산과장		안인숙

「올림픽대교 외 1개소 승강기 설치」

기본 및 실시설계 시행계획

2021. 3.

한강사업본부

(시  설  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「올림픽대교 외 1개소 승강기 설치」

기본 및 실시설계 시행계획

한강공원 진출·입 승강기 설치사업 타당성 용역(2017년) 결과 년차별 투자계획에 의거 시행중인 설치대상 중 잔여 2개소에 대한 실시설계 용역을 발주하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

○ 사 업 명 : 한강교량과 한강공원 연결 승강기 설치

○ 대    상 : 올림픽대교 북단 외 1개소(영동북단)

○ 규    모 : 승강기 신설 2개, 노후 계단 교체 2개소

○ 사업기간 : 2021.03. ~ 2021.12.

○ 사 업 비 : 150백만원(설계비)

Ⅱ		추진경위

○ 2016.07.20. : 한강교량 접근시설(E/V) 개선계획 방침(본부장)

○ 2017.11.30. : 타당성조사 용역완료(연차별 사업계획 수립)

※ 투자심사 결과(‘17.9.29): 비용편익비 순으로 조건부 사업추진

○ 2018.10.02. : 한강교량 연결 승강기 설치 추진계획

○ 2019.01.16. : 한강교량 연결 승강기 설치 사업계획 변경

○ 2020.11. ~ 2022.12 : 양화남단 구조개선사업 추진중

○ 2021.03 현재 : 서강대교북단 공사중

Ⅲ		연차별계획

○  사업대상 : 가양대교남단 서측 등 14개소(투심 120억원)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023
설 계	· 가양남단 · 올림픽남단	· 성수남·북단 · 동작북단 · 양화북단 · 서강북단 · 동호남단		· 올림픽 북단 · 영동 북단		· 천호남단 · 천호북단 · 성산남단 · 성산북단
공 사		· 가양남단 · 올림픽 남단 (‘18.~ ’19 공사완료)	· 성수남·북단 · 동작 북단 (‘19.~’20 공사완료)	· 서강북단 (공사중)	· 양화 북단 · 동호 남단 · 영동 북단 · 올림픽 북단	· 천호남단 · 천호북단 · 성산남단 · 성산북단
사업추진 현황	ㅇ 타기관 추진 성능개선(계단 → 승강기) : 4개소) · 성산 남·북단 : 성능개선공사 포함 시행 (교량안전과, 도기본) · 천호 남·북단 : 확장 타당성 용역(도로계획과) (남단 추가협의 필요)

Ⅳ		세부 추진계획

○ 설계대상 : 올림픽대교 북단 외 1개소

- 올림픽대교 북단, 영동대교 북단 : 승강기 신설 및 노후 계단 교체

○ 사업내용 : 한강공원의 원활한 진출·입과 이용 시민의 편의를 고려하여 승강기 설치

○ 추진일정 : 2021년 실시설계 용역완료(′22년 이후 공사추진)

○ 예    산 : 150백만원

- 예산확보 : 「서강대교북단 승강기 설치」사업비(15억원)에서 집행

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 접근시설 유지관리, 한강교량 한강공원 연결 승강기 설치, 시설비

Ⅴ		향후 조치계획

○ 2021. 03. : 설계용역 타당성 심사

○ 2021. 04. : 기본 및 실시설계 발주

○ 2021. 12. : 설계용역 완료

붙임  위치도 1부.  끝.