투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시경찰청장(교통관리과장)
(경유)
제목	교통소통대책에 따른 도로공사장 점용기간 연장요청(청계천로)

1. 관련근거 : 교통관리과-17467(2020. 8.28.) “공사중 교통안전시설 개선 설치 통보(하달)[청계천로 자전거]”

2. 위와 관련 우리시에서 시행중인 「청계천로 자전거 전용도로 설치공사」공사중 교통소통대책에 따른 도로공사장 점용기간을 연장요청하오니 승인하여 주시길 바랍니다.

가. 점용기간 연장 현황

- 기간연장 : (당초)2020. 3. 10. → (변경)2021. 6. 30.

- 연장사유 : 동절기 공사중지 및 시공물량 증가 등.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남만조		도시고속도로과장	장수철		토목부장	03/25 김용제
협조자
시행	토목부-5665	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어 플레이스빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개