문서번호	총무과-8216
결재일자	2021. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	김창중	03/25 김혁

서소문청사 1동 건물일체형 태양광(BIPV) 발전장치 조달구매

납품기한 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

행  정  국

(총  무  과)

서소문청사 1동 건물일체형 태양광(BIPV) 발전장치 조달구매

납품기한 연장 검토 보고

「서소문청사 1동 건물일체형 태양광(BIPV) 발전장치 조달구매」와 관련 외벽 석재설치 공정과 맞추어 납품기한을 연장 하고자 함

□ 물품개요

○ 건   명 : 서소문청사 1동 건물일체형 태양광(BIPV) 발전장치 조달구매

****************************

**************************************

○ 납품기간 : ****************************

□ 변경 사유 및 주요내용

○ 관련 근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행자부예규 제114호, ’20.6.10)

○ 변경 사유

- 건축일정(시스템 비계 설치 및 외벽 설치)에 따른 설계기간 변경

○ 변경 금액 : 없음

○ 납품기한 변경

당 초	2021. 03. 29.
변 경 후	2021. 08. 10.

□ 향후일정

○ 변경 계약 의뢰 --------------  2021. 3. 26.(금)

붙임 : 1. 합의각서 1부.  끝.