코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	문화체육관광부장관(체육진흥과장)
(경유)
제목	2019년 국민체육센터(생활밀착형) 사업계획 변경 승인 요청

1. 사람이 있는 문화를 실현하기 위해 애쓰시는 귀 기관의 발전을 기원합니다.

2. 2019년 생활체육시설 확충 지원사업 2차 추경 공모사업(문체부 체육진흥과-4820호, 2019. 11. 27.) 및 국고보조금 지원사업 변경계획 제출(서초구 교육체육과-4688호, 2021. 3. 24.) 관련입니다.

3. 2019년 생활밀착형 국민체육센터 사업 계획을 아래와 같이 변경하고자 요청드리니 승인하여 주시기 바랍니다.

사업계획 변경 개요

○ 사 업 명 : 서초구 반포종합운동장 체육센터 건립

○ 교부예산 : 3,000백만원(국민체육진흥기금)

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 변경내용

(단위 : 백만원, ㎡)
구분	당초	변경	변경사유
사업비	18,700	23,412	건축공사비 상승(’17년 2,580㎡ → ’20년 3,280㎡)
건축면적	4,767	5,918	층별 활용 시설계획 변경, 기계실 등 연면적 포함

붙임  사업 변경계획서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	황선민		생활체육시설팀장	우명섭		체육진흥과장	전결 03/25 이미숙
협조자
시행	체육진흥과-2944	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 14층	/
전화	02-2133-2742	/전송	02-2133-1411	/	energizer98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)