투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「천호공원 노후시설 정비공사 실시설계용역」기간 연장 의뢰

1. 시설과-1049(2021.3.25.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『천호공원 노후시설 정비공사 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 천호공원 노후시설 정비공사 실시설계용역

나. 도 급 액 : 금44,050,000원

다. 용역기간 : 2021. 1. 29 ~ 3. 29

라. 도 급 자 : 조경상회 스튜디오엘 대표 김지연

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2021. 1. 29 ~ 3. 29

- 변  경 : 2021. 1. 29 ~ 4. 18(20일 연장)

바. 연기사유

- 전문가 자문회의(2회) 및 각종 보고회 등 의견수렴에 시일 소요

- 중장기 마스터플랜 결과에 따른 실시설계 대상지 추가 측량 및 현장 실측 등에 시일소요

사. 용역비 변경 : 해당없음

아. 지체상금 : 미부과

붙  임 : 기간 연장 검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김재희		공원조성팀장	하종식		시설과장	03/25 박종수
협조자
시행	시설과-1051	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	부분공개(5)