문서번호	설비부-3999
결재일자	2021. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	03/26 김중영
협조

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사  공사기간 연장 검토보고

2021. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

공사기간 연장 검토보고

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 관련, 선행공종 지연으로 인한 기계설비공사 공사기간 연장에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

○ 공사명: 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

○ 위  치: 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

○ 규  모: 하수처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L)+ 비총인 416,000㎥/일(TP 0.81㎎/L) ⇒ 혼합방류(TP 0.46㎎/L)

○ 기  간:′17.11.20.~′21.3.31.(3차′20.1.16∼′21.3.31.)

○ 도급비: 3,071백만원(3차 1,884백만원)

○ 건설사업관리단, 시공사: ㈜천일 외3, ㈜대원엠이씨

○ 공정률: 99.8%

2		관련근거

○ 공기연장 요청 검토보고(중랑감  제21-162호:′21.3.25.)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제13장 공사계약 일반조건)

- 제8절 계약이행의 지체와 계약의 해제▪해지(2. 계약기간의 연장)

3		검토내용

◯ 변경개요

구분	계약금액(천원)			계약기간		비고
	당초	변경	증감	당초	변경
총차	3,071,553	3,071,553	변경없음.	′17.11.20 ~′21.3.31	′17.11.20 ~′21.4.30	30일 연장
3차	1,884,381	1,884,381	변경없음.	′20.1.16 ~′21.3.31	′20.1.16 ~′21.4.30	30일 연장

◯ 변경사유:  선행공종(토목) 지연으로 인한 공사기간 연장

- 총인처리시설 문제발생시 비상용으로 사용하고자 설치하는 A▪B총인계열 바이패스수문(4.4×1.6m) 구조물 공사가 수중작업이 수반되는 高난도 작업으로 지연되고 있음.

- 현재 진행중인 종합시운전에는 영향이 없으나,  문비 양생 등 수문 설치작업을 위해서는 30일의 공사기간 연장이 필요함.

◯ 건설사업관리기술자 의견: 선행공종 지연에 따른 기계설비공사 공기부족으로 공사기간을 30일간 연장하는 것이 바람직하다고 사료됨.

※ 토목공사 준공기한:′21.5.31, 종합시운전용역 준공기한:′21.5.29

4		검토결과

◯ 선행공종(토목) 지연으로 인한 기계설비공사 공사기간 연장이 적합하다고 판단되므로 공사기간 연장에 따른 계약기간 변경을 의뢰하고자 함.

붙임: 공기연장 검토보고(건설사업관리단) 1부  끝.