설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

1. 공사명 : 강북아리수정수센터 응집침전지 보수공사

신청부서명	정수시설과
작 성 자	김 수 영
제출년월일	2021. 3. 29.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2021.  3. 29.(월) 09:30

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여

아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

정수시설과장

백상희

03/29

백상희

타당함

위    원

주무관

강석윤

강석윤

타당함

위    원

주무관

김영수

김영수

적정함

위    원

주무관

김진민

김진민

타당함

위    원

주무관

함인석

함인석

적정함

담    당

주무관

김수영

김수영

타당함

설계변경 사유서

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 강북아리수정수센터 입상활성탄 교체공사

❍ 공사기간: 2020. 7.14. ~ 2021. 3.30.

❍ 공사개요: 입상활성탄 교체 2,610㎥(12지)

❍ 계약금액: 금340,359,230원

❍ 계약업체: ㈜티앤디건설 대표 김승룡

□ 설계변경 내용 및 사유

❍ 컨테이너형가설건축물(창고) 미설치로 물량 감소 발생

‣ 사유 : 계약업체가 가설창고 미설치

❍ 활성탄동 내부 바닥 보양재 설치로 신규공종 발생

‣ 사유 : ISO22000시설인 활성탄동 내부 바닥재 손상 및 환경저해 우려로 보양재 설치후 활성탄 교체공사 시행

❍ 건강·연금·노인장기요양보험료 정산 시행

‣ 계약자 납부내역 : 붙임 보험료 납부내역서 참조

구 분	소 계	1월	2월	비 고
건강보험료	1,315,040	985,760	329,280
연금보험료	1,746,000	1,314,000	432,000
장기요양보험료	144,400	106,480	37,920

❍ 법령에 의한 기타 제경비 산정 및 사용금액 정산에 따라 증감 발생

‣ 증가 제경비 : 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 건설기계대여금지급보증서 발급금액, 산업안전보건관리비, 환경보존비, 일반관리비, 이윤

○ 시공수량 변동

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
【 활성탄 교체 】
활성탄 준설		㎥	2,610	2,610	-
활성탄 포설		㎥	2,610	2,610	-
폐활성탄 운반	현장~집하장(센터내)	㎥	2,610	2,610	-
신규활성탄 운반	집하장(센터내)~현장	㎥	2,610	2,610	-
【 부대공 】
바닥청소		㎡	3,127	3,127	-
공사안내간판	1.8m×0.9m	개	1	1	-
컨테이너형가설건축물	창고,3*6m(6개월)	개	1	0	감 1
바닥보양		㎡	-	670	증 670	신규

○ 건강·연금·노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비 등 정산 시행

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
건강보험료		원	4,525,128	1,315,040	감3,210,888	납부금액 감소
연금보험료		원	6,105,869	1,746,000	감4,359,869	납부금액 감소
노인장기보험료		원	463,825	134,791	감329,034	납부금액 감소
퇴직공제부금비		원	3,120,777	1,072,500	감2,048,277	납부금액 감소
건설기계대여금지급보증서 발금금액		원	1,024,760		감1,024,760	미납
산업안전보건관리비		원	5,773,904	5,773,904	-
환경보존비		원	1,004,666	-	감1,004,666	미납

○ 설계변경 금액(변동 있음)

구 분		금 액		증·감	비 고
		당초	변경
총 공 사 비		340,359,230	325,140,000	감15,219,230	물량증감, 보험료 정산
도급비	공급가액	309,417,482	295,581,819	감13,835,663
	부가세	30,941,748	29,558,181	감1,383,567
	계	340,359,230	325,140,000	감15,219,230

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.