“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	도로관리과-6104		주무관	도로관리팀장		도로관리과장		안전교통국장
			조명철	우한상		이한규		03/29 김만호
등록일자	2021.3.29.
결재일자	2021.3.29.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		이수진
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

- 2020/2021년 區, 洞 제설대책 민간위탁 용역(장기계속) -

설계변경 시행 계획(총차 최종, 1차 최종)

2020/2021년 제설대책 비상근무 현황

구 분	강설현황		비 상 근 무 현 황					비 고
	횟수	적설량	계	보강	1단계	2단계	3단계
2020/2021	11회	31.3cm	16회	6회	6회	5회	-
2019/2020	5회	9.4cm	16회	11회	5회	-	-	참고
2018/2019	9회	18.3cm	13회	9회	3회	1회	-

설계변경 사유

제설대책 비상근무 발령에 따른 실제 작업 및 대기 시간 반영

용역비 증·감 내역

(단위: 원)

구분	區 용역			洞 용역
	당초	변경	증ㆍ감	당초	변경	증ㆍ감
총차	831,800,000	1,036,600,000	증)204,800,000	211,172,000	464,000,000	증)252,828,000
1차	817,670,000	1,036,600,000	증)218,930,000	132,090,000	464,000,000	증)331,910,000

조치계획

상기 보고내용과 같이 설계변경(총차 최종, 1차 최종)을 시행하고자 함.

2021. 3.

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조 • 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 2020/2021 제설대책 종료에 따른 용역 실제 작업시간 증･감 사항 반영
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 검토완료
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 강남구 구민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 2020/2021년 區, 洞 제설대책 민간위탁 용역(장기계속) -

설계변경 시행 계획(총차 최종, 1차 최종)

2020/2021년 제설대책 종료에 따라 비상근무 발령에 따른 실제 작업 및 대기 시간을 반영 및 정산을 위하여 『2020/2021년 區ㆍ洞 제설대책 민간위탁 용역』의 설계변경을 다음과 같이 시행하고자 함.

Ⅰ		’20/21년 겨울철 비상근무 현황

구 분	강설현황		비 상 근 무 현 황					비고
	횟수	적설량	계	보강	1단계	2단계	3단계
2020/2021	11회	31.3cm	16회	6회	6회	5회	-
2019/2020	5회	9.4cm	16회	11회	5회	-	-	참고
2018/2019	9회	18.3cm	13회	9회	3회	1회	-

Ⅱ		용 역 개 요

용 역 명		2020/2021년 區 제설대책 민간위탁 용역	2020/2021년 洞 제설대책 민간위탁 용역
용역기간	총차	2020. 11. 5. ~ 2021. 3. 31.	2020. 11. 5. ~ 2021. 3. 31.
	1차	2020. 11. 5. ~ 2021. 3. 31.	2020. 11. 5. ~ 2021. 3. 31.
계약금액	총차	831,800,000원	211,172,000원
	1차	817,670,000원	132,090,000원
도 급 자		양지기초건설㈜ 대표 백종일	청계중기㈜ 대표 유은옥
예산과목		도로관리과, 도로시설관리, 재해(설해)예방관리대책, 제설대책, 민간이전, 민간위탁금

Ⅲ		설계변경 내용

설계변경 사유: 2020/2021년 제설대책 종료에 따라 비상근무 발령에 따른 실제 작업 및 대기 시간 반영

주요 공종 증ㆍ감 내역

2020/2021년 區 제설대책 민간위탁용역

공 종	단위	총 차			1 차			비고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
작업원(주간)	시간	1,982	2,906	증) 924	1,982	2,906	증) 924
작업원(야간)	시간	787	1,287	증) 500	787	1,287	증) 500
중기작업원(주간)	시간	911	1,467	증) 556	911	1,467	증) 556
중기작업원(야간)	시간	606	1,044	증) 438	606	1,044	증) 438
덤프트럭(15톤,가동,주간)	시간	1,865	1,356	감) 509	1,865	1,356	감) 509
유압식백호우(0.6㎥,가동,주간)	시간	730	957	증) 227	730	957	증) 227
유압식백호우(0.6㎥,대기)	시간	388	708	증) 320	388	708	증) 320
크레인트럭(25톤,가동,주간)	시간	91	307	증) 216	91	307	증) 216
카고트럭(4.5톤,가동,주간)	시간	24	176	증) 152	24	176	증) 152

2020/2021년 洞 제설대책 민간위탁용역

공 종	단위	총 차			1 차			비고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
제설작업(1톤, 주간)	시간	640	2,403	증)1,763	320	2,403	증)2,083
제설작업(1톤, 야간)	시간	480	830	증) 350	320	830	증) 510
덤프트럭(1톤, 대기)	시간	1,120	2,638	증)1,518	940	2,638	증)1,698
제설작업(4.5톤, 주간)	시간	160	522	증) 362	80	522	증) 442
덤프트럭(4.5톤 상시대기)	일	570	535	감) 35	225	535	증) 310
운전원 대기(야간)	시간	32	1,588	증)1,556	16	1,588	증)1,572
작업원(주간, 작업)	시간	128	284	증) 156	64	284	증) 220

용역비 증ㆍ감 내역

(단위: 원)

구분	區 용역			洞 용역
	당초	변경	증ㆍ감	당초	변경	증ㆍ감
총차	831,800,000	1,036,600,000	증)204,800,000	211,172,000	464,000,000	증)252,828,000
1차	817,670,000	1,036,600,000	증)218,930,000	132,090,000	464,000,000	증)331,910,000

예산과목

- 도로관리과, 도로시설관리, 재해(설해)예방관리대책, 제설대책, 민간이전, 민간위탁금: 390,840,000원(구비)

- 안전총괄실 안전총괄과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구 재난예방(재난관리기금 재난계정), 사무관리비: 160,000,000원(시비)

Ⅳ		조 치 계 획

상기 보고내용과 같이 2020/2021년 區ㆍ洞 제설대책 민간위탁 용역 (장기계속)에 대한 설계변경(총차 최종, 1차 최종)을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서[區, 洞(총차 최종, 1차 최종)] 4부.

2. 2020/2021년 제설대책 비상근무 현황 1부.  끝.