문서번호	정수시설과-3613
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		전훈	03/30 조성태
협 조
	주무관			김희송

『2020년 수배전반외 2종 전력기기부품 구매 설치(장기계속)』

설계변경(총차_2회 및 2차_1회) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 03.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『2020년 수배전반외 2종 전력기기부품 구매 설치(장기계속)』

설계변경(총차_2회 및 2차_1회) 계획 보고

장기계속 계약으로 시행 중인 수배전반 연간단가에 대해 납품지시 물량 반영 및 보험료 등 정산 설계변경 보고임.

		사업 개요

○ 계 약 명 : 2020년 수배전반외 2종 전력기기부품 구매 설치(2차)

○ 계약금액 : 금63,125,000원(총차 156,790,000원)

○ 계약기간 : 2021.01.01.~03.31.(총차, 2020.04.17.~2021.03.31.)

○ 계 약 자 : ***************

		설계변경 사유

○ 2오니장 저압반 현장 개조에 따른 신규 품목 반영 및 보험료 등 정산 설계변경

		관련 근거

○ 2020년 수배전반외 2종 전력기기부품 구매 설치 납품지시(1차 2회 및 2차 1회)

○ 지자체 입찰 및 계약집행 기준(제15장 물품계약일반조건 제6절 수량조절 등)

		설계 변경

○ 물품계약 변경 현황

구 분	계 약 금 액(원)				증·감 (원)
	당 초		변 경
총사업비	156,790,000		155,512,000		감) 1,278,000
	1차(2020년)	2차(2021년)	1차(2020년)	2차(2021년)
재 료 비	56,449,228	29,148,243	56,449,228	29,225,729	증) 77,486
노 무 비	8,385,992	19,180,416	8,385,992	19,766,086	증) 585,670
경 비	3,589,003	2,335,821	3,589,003	907,736	감) 1,428,085
기 타	25,240,777	12,460,520	25,240,777	11,947,449	감) 513,071
소 계	93,665,000	63,125,000	93,665,000	61,847,000	감) 1,278,000

○ 정산대상 보험료 등 변경내용(2차)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감(원)
산 재 보 험 료	715,429	737,275	증) 21,846
고 용 보 험 료	166,870	170,461	증) 3,591
국민건강보험료	592,833	-	감) 592,833
국민연금보험료	799,924	-	감) 799,924
노인장기요양보험료	60,765	-	감) 60,765
산업안전보건관리비	-	-	-
합 계	2,335,821	907,736	감) 1,428,085

○ 주요 변경 내용(2차, 직접공사비) ※ 세부사항은 붙임 참조

구분	변 경 사 항	변경 금액(원)
		당 초	변 경	증()·감(△)
2오니장 저압배전반		0	620,276	620,276
모선개조	인터록 해제 VCB 2대	0	413,026	413,026
	기존부스바철거(12T*50) 1M	0	25,952	25,952
	단말부스바설치(12T*50) 2M	0	181,298	181,298

		조치 의견

○ 상기와 같이 2차 계약 납품지시와 1차 계약 미반영 물량을 반영하여 붙임과 같이 설계변경계약하여 준공코자 하며 정산대상 보험료 등은 납부증빙자료에 따라 정산하고자 함.

붙 임  1. 설계변경내역서(총차 및 2차) 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.