문서번호	도시철도토목부-12978
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
한재호		최진규	12/07 최병훈
협조
	주무관		이형일

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역』

준공기한 연장(총차, 6차) 검토

2020. 12.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역』

준공기한 연장(총차, 6차) 검토

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역』관련 건설사업관리단으로부터 제출된 준공기한 연장(총차, 6차)에 대한 검토임.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역

○ 규    모 : 총 36,959.6ton

- 폐아스콘 11,126ton, 폐콘크리트 22,601.6ton, 건설폐자재 3,144ton, 혼합건설폐기물 88ton

○ 계약업체 : 대진환경산업(주) 대표 장인자

○ 계약현황

[단위 : 천원]

구 분	전 체	기시행(1~5차)	금회(6차)	장 래
용역기간	`15.08.24 ~ `20.12.31.	`15.08.24 ~ `18.12.31	`19.02.14 ~ `20.12.31	`21.01.01 ~
계약금액	964,000 (100.0%)	572,779 (59.4%)	182,670 (19.0%)	208,551 (21.6%)

2		추진현황

○ 건설폐기물처리용역(6차) 폐기물 현황

[`20.11.30 기준]

구 분	단위	계 약	처 리 량	잔 량	잔량 처리계획
폐아스콘	ton	2,500	951.76	1,548.24	도로복구시 처리
폐콘크리트	ton	4,017.78	3,963.60	54.18	공사 중 발생량 처리
폐 토 석	ton	329.14	259.19	69.95
혼합폐기물	ton	88	22.37	65.63
소 계		6,934.92	5,196.92	1,738

3		보고내용

○ 내    용 : 본 공사 공정에 따라 원활한 폐기물 처리를 위한 준공기한 연장

○ 현    황

- 총차

구 분	수 량		계약금액	용역기간
당 초	폐아스콘	11,126 ton	964,000천원	`15.08.14 ~ `20.12.31
	폐콘크리트	22,601.6 ton
	건설폐자재	3,144 ton
	혼합건설폐기물	88 ton
	계	36,959.6 ton
변 경	폐아스콘	11,126 ton	964,000천원	`15.08.14 ~ `21.12.31
	폐콘크리트	22,601.6 ton
	건설폐자재	3,144 ton
	혼합건설폐기물	88 ton
	계	36,959.6 ton
증·감	- 변경 없음 -		- 변경 없음 -	증)12개월

- 6차

구 분	수 량		계약금액	용역기간
당 초	폐아스콘	2,500 ton	182,670천원	`19.02.14 ~ `20.12.31
	폐콘크리트	4,017.8 ton
	건설폐자재	329.1 ton
	혼합건설폐기물	88 ton
	계	6,934.9 ton
변 경	폐아스콘	2,500 ton	182,670천원	`19.02.14 ~ `21.12.31
	폐콘크리트	4,017.8 ton
	건설폐자재	329.1 ton
	혼합건설폐기물	88 ton
	계	6,934.9 ton
증·감	- 변경 없음 -		- 변경 없음 -	증)12개월

4		관리단 검토의견

하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 준공기한 연장에 따라 폐기물처리가 원활히 수행될 수 있도록 건설폐기물처리용역에 대한 준공기한 연장은 타당하다고 판단됨.

5		조치의견

하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역에 대하여 상기 검토의견과 같이 승인하고, 준공기한을 연장하고자 함.

붙임    1. 관리단 공문 및 검토의견서 1부.

2. 관련서류 1부.

3. 총차 및 6차 내역서 1부. 끝.