문서번호	체육정책과-3415
결재일자	2021. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		체육시설팀장	체육정책과장
염정호		이외재	03/26 이창현
협조

- 광장동 체육시설부지 개발 -

기본계획 수립 용역 계약 변경 계획

2021. 3.

관광체육국

(체육정책과)

- 광장동 체육시설 부지 개발 -

기본계획 수립 용역 계약 변경 계획

「광장동 체육시설부지 개발 기본계획 수립 용역」에 대하여 용역사로부터 합리적 건축 배치 계획 관련 외부 전문가 자문 청취기간 소요를 이유로 과업 기간 연장 요청이 있어 용역의 내실화를 위해 계약기간을 연장하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 광장동 체육시설부지 개발 기본계획 수립 용역

○ 계약업체 : 주식회사 건축사사무소 디자인유니트 디엠

○ 계약기간 : ’20. 10. 5. ~ ’21. 4. 4.(182일)

○ 계약금액 : 금52,240,000원

○ 주요 과업내용

- 기본 구상 발전 및 기본계획 수립(건축기획 업무 수준)

- 사업비 산정, 공종별, 재원별 투자 계획 등 사업계획(안) 제시

□ 계약기간 연장 사유

○ 합리적인 건축물 배치 계획을 위한 외부 전문가 자문 청취기간
소요로 용역 기간 연장 필요

□ 계약변경 내용

○ 계약기간 변경(계약금액 및 과업내용은 변동 없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	’20. 10. 5.~ ’21. 4. 4. (182일)	’20. 10. 5.~ ’21. 6. 4. (243일)	계약기간 변경 (61일 연장)
계약금액	금52,240,000원	좌동	변경 없음

○ 귀책소재 : 서울시

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 관련근거 :「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제14장 용역계약 일반조건,
제7절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지, 2. 계약기간의 연장

□ 행정사항

○ 용역 계약변경 의뢰 : 체육정책과 →재무과

○ 용역 준공 : ’21. 6. 4.

붙임 : 1. 실정보고서(용역사) 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.