문서번호	동북권사업과-2813
결재일자	2021. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	발전기획팀장	동북권사업과장	지역발전본부장
황인태	오대중	代오대중	03/29 김상한
협 조
	주무관		한승균

「서울 바이오메디컬 클러스터 육성 및 유치전략 방안 마련 용역」

준공기한 연기 검토 보고

2021. 3.

지역발전본부

동북권사업과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「서울 바이오메디컬 클러스터 육성 및 유치전략 방안 마련 용역」

준공기한 연기 검토 보고

창동차량기지 일대 혁신성장거점의 성공적인 추진을 위해 시행중인「서울 바이오메디컬 클러스터 육성 및 유치전략 방안 마련 용역」에 대한 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울 바이오메디컬 클러스터 육성 및 유치전략 방안 마련

○ 용역기간 : ’20. 3. 31. ~ ’21. 3. 30.

○ 용역업체 : 삼일회계법인 대표 윤훈수 외 1

○ 용 역 비 : 902백만원

□ 추진경위

○ ’20. 3.	용역계약 체결 및 착수

○ ’20. 4.	착수보고회

○ ’20. 4.~ 6.	기업, 병원, 공공기관 실무회의 및 전문가 자문

○ ’20. 7.~12.	육성 및 유치전략 방안 구상 및 실무 TF회의(3회)

- ‘20. 7.	핵심사업 추진시기 조정 검토보고 (마스터플랜 발표시기 연기)

○ ’21. 1.	중간보고회

○ ’21. 1.~ 3.	빅4병원(서울대, 신촌세브란스, 서울아산, 서울삼성) 면담 추진 등

□ 준공기한 연기 검토

○ 용역 연기사유(귀책사유 : 서울시)

- 마스터플랜 발표시기 연기 및 핵심 앵커시설인 대형병원 등이 소극적인 태도로 유치활동에 제한적이고, 보궐선거 이후 핵심 앵커시설에 대한 정책적 결정이 필요한 상황으로, 사업의 안정적인 추진을 위한 충분한 검토기간이 필요함에 따라 준공기한 연기가 불가피함.

○ 용역 연기내용(지체상금 : 미부과)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	’20. 3. 31. ~ ’21. 3. 30.	’20. 3. 31. ~ ’21. 6. 30.	증 91일
용 역 비	902,000천원	902,000천원	변경없음

□ 향후일정

○ ’21. 3.30.   용역 변경계약 체결

○ ’21. 4 ~ 5. 혁신성장거점 육성 및 유치 세부전략 마련

○ ’21. 6.       마스터플랜 발표(예정) 및 용역준공

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경공정표 1부.  끝.