문서번호	영동대로복합개발추진단-2359
결재일자	2021. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	사업총괄과장	영동대로복합개발추진단장		도시철도국장
김선만	김형건	이승석		03/29 한유석
협 조

영동대로 지하공간 복합개발사업

지하안전영향평가 협의 결과 및 용역 준공 보고

2021. 3.

도시기반시설본부

(영동대로복합개발추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

영동대로 지하공간 복합개발사업

지하안전영향평가 협의 결과 및 용역 준공 보고

영동대로 지하공간 복합개발과 관련하여 ｢지하안전관리에 관한 특별법｣ 에 따라 시행한 지하안전영향평가의 협의 결과 및 용역 준공에 대한 보고임.

□ 관련 근거

○ ｢지하안전관리에 관한 특별법｣ 제14조 및 같은 법 시행령 제13조

- 대상 : 굴착깊이가 20m 이상인 굴착공사를 수반하는 사업

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 강남권 광역복합환승센터 지하안전영향평가용역

○ 과업구간 : 삼성역 사거리(2호선 삼성역)~코엑스 사거리(9호선 봉은사역) 1Km

○ 용 역 사 : ㈜대한콘설탄트 대표 이영민

○ 용역기간 : ’18. 5. 10.~’21. 3. 30.

○ 용 역 비 : 금151,320,500원

□ 추진 현황

○ '18.04.04. : 지하안전영향평가 용역 시행계획 수립

○ '18.05.10. : 지하안전영향평가 용역 착수

○ '19.05.03. : 지하안전영향평가 용역 1차 준공연기('19.5.9.→'19.12.30.)

○ '20.07.09. : 지하안전영향평가서 제출(서울시→서울국토청)

○ '20.07.16. : 지하안전영향평가서 제출 회신(서울국토청→서울시)

○ '20.08.~09.: 국토교통부(서울국토청) 방문 협의

○ '20.10.27. : 지하안전영향평가서 보완 요청(서울국토청→서울시)

○ '21.01.27. : 지하안전영향평가서 보완 제출(서울시→서울국토청)

○ '21.03.05. : 지하안전영향평가 협의결과 통보(서울국토청→서울시)

○ '21.03.17. : 지하안전영향평가 협의결과 간담회(도기본,실시설계적격자,용역사)

(실시설계적격자 : 실시설계시 서울국토청 협의의견 반영계획)

□ 지하안전영향평가 협의 결과

【서울지방국토청 협의 결과서】

1. 사 업 명 : 영동대로 지하공간 복합개발 관련 강남권 광역복합환승센터

2. 사업위치 : 서울시 강남구 코엑스 사거리~ 휘문고교 일대

3. 사업내용

공 사 명	영동대로 지하공간 복합개발 관련 강남권 광역복합환승센터
공사개요	ㅇ 광역복합 환승센터 설치 ㅇ 사업구간 L=1,000m(복합환승센터 597m, 철도 403m) ㅇ 굴착면적 58,730㎡, 최대굴착심도 51.53m
승인기관	서울특별시 도시기반시설본부	지하개발사업자	서울특별시 도시기반시설본부
사업기간	착공일로부터 86개월	공사비	17,459억원
지하수위	측정 : GL(–) 13.85~19.90m 설계 : GL(–) 10.85~16.90m
흙막이 공법	벽체 : 지하연속벽, Secant pile, H-pile+토류판 지지 : 버팀보 굴착공법 : 발파공법, 기계굴착

4. 협의근거 : 지하안전관리에 관한 특별법 제18조

5. 사업시행자/승인기관 : 서울특별시 도시기반시설본부 /

서울특별시 도시기반시설본부

6. 사업기간/사업비 : 착공일로부터 86개월 / 17,459억

7. 협의의견 : 조건부 동의

【서울지방국토청 조건부 동의 주요내용】

○ 동사업은 기본설계 기술제안 방식으로 사업추진하고 있고, 기본     설계 단계에서 지하안전영향평가를 제출함으로써 지반안전성 및     지하안전확보 방안 수립에 일부 제약이 있어,

○ 본 협의내용(조건부 협의내용, 일반 협의내용 등), 보완 요청사항,     지하안전 전문가 자문, 학회 검토사항, 검토기관 의견 등을 실시     설계시에 반영하고, 이에 따른 지하수 변화, 지반안전성 및 지하     안전확보 방안을 반드시 재검토한 후 공사를 시행하여야 함.

【조건부 동의 반영의견(안)】

○ 본 협의내용, 지하안전전문가 의견, 학회 검토사항, 검토기관 의견       등을 실시설계에 반영하고 이에 따른 지하수변화, 지반안전성 등을      재검토하여 공사를 시행하도록 하겠음.[별첨 반영결과 통보서(안)]

※ 기술제안입찰에 따른 우선시공분 변경사항에 대하여는 서울국토청과      별도협의 추진

- 공통사항 : 흙막이 벽체(지하연속벽 D/W0.8m → D/W0.8~1.0m)

- 토목1공구 : 수직구 지보공(강관버팀보Ø406 → 링빔H-300)

□ 용역 준공내역

○ 과업준공 : 본 용역의 과업내용인 국토교통부 지하안전영향평가 협의 완료                 시까지 용역수행을 이행(협의결과:조건부 동의)

○ 준공내역                                                      (단위:원)

구분	계약금액	준공금액			비고
		전회(선급금)	금회	누계
용역비	151,320,500	60,191,400	91,129,100	151,320,500

□ 향후 계획

○ ’21. 4. : 협의내용 반영결과서 통보(서울시 → 서울국토청)

※ 기술제안에 따른 우선시공분 변경사항은 서울국토청과 별도 협의

붙임 1. 지하안전영향평가 협의결과(국토부 공문) 1부.

2. 협의내용 반영결과 통보서(안) 1부.(별첨:용량초과)

3. 우선시공분 변경사항 협의(안) 1부.  끝.