“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의위원회 개최[2020년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)-2차]

우리 사업소에서 시행 중인“2020년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)”에 대해 신규 공종 및 물량 증·감에 따른 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의위원회를 개최코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2020년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요  - 당초 : 노후밸브교체 68개소, 제수밸브설치 및 정비 84개소

- 변경 : 노후밸브교체 64개소, 제수밸브설치 및 정비 78개소

다. 공사기간 : 2020. 4. 20. ~ 2021. 5. 31.

라. 도 급 비

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총부기금액	***********	***********	*********
1차수 금액	***********	***********	*
2차수 금액	**********	**********	**********

마. 시 공 사 : ************

2. 심의회 개최 현황

가. 심의 일정  : 2021. 4. 1.(목) 09 : 30

나. 심의 장소  : 급수운영과

다. 심의위원장 : 급수운영과장

라. 심의   위원  : 시설6급 서은교, 시설6급 김성호, 시설7급  안윤자, 시설7급 이한수

3. 심의내용

가. 설계변경의 타당성

나. 제경비 적정산정 및 적정적용

다. 부대공 및 신규공종 적정산정

라. 기타 제반규정 적정 준수여부 등.

첨 부 : 1) 설계변경 심의 요청 및 사유서 각 1부

2) 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	박상권		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	03/31 이승완
협조자	주무관	안윤자		주무관	이한수		주무관	서은교
시설안전팀장	김성호
시행	급수운영과-5516	(		)	접수		(		)
우	03731	서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설안전부 시설과	/
전화	02)3146-3343	/전송	02)3146-1529	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)