문서번호	역사문화재과-6408
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	문화재사업팀장	역사문화재과장
김대훈	정경란	04/01 권순기
협 조

서울 앨버트 테일러 가옥(딜쿠샤)

주변 정비공사 시행 계획

2021. 4.

문 화 본 부

(역사문화재과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서울 앨버트 테일러 가옥(딜쿠샤)

주변 정비공사 시행 계획

국가등록문화재 제687호 「서울 앨버트 테일러 가옥(딜쿠샤)」 주변 정비사업 추진을 위하여 아래와 같이 공사를 시행하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 서울 앨버트 테일러 가옥(딜쿠샤) 주변 정비사업

□ 위    치 : 서울특별시 종로구 행촌동 1-91

□ 사업목적 : 딜쿠샤 역사문화환경 보존, 경관확보 및 시민 접근성 향상

□ 사업내용 : 딜쿠샤 주변 지형 회복 및 관리소 설치

□ 사업기간 : ’20. 8. ~ ’21. 7. (설계 착수 ~ 공사 준공)

□ 총사업비 : 6억원 (국비 3억원 / 시비 3억원)

□ 추진경과

’19.06.27. : 사업부지 매입 완료

’19.12.31. : 국고보조사업 확정

’20.03.03. : 자문위원회 구성

’20.04.28. : 제1차 자문위원회 개최

’20.06.30. : 추경편성(국비3억/시비3억)

’20.08.13. : 설계용역 착수

’20.09.11. : 제2차 자문위원회 개최

’20.12.16. : 딜쿠샤 전면 주택(행촌동 1-91) 철거 완료

’20.12.16. : 제3차 자문위원회 개최

’21.02.02. : 제4차 자문위원회 개최

’21.03.17. : 국고보조사업 지침변경 승인(관리소 설치 추가)

’21.03.23. : 문화재청 설계승인

’21.03.31. : 설계용역 준공

Ⅱ		공사계획

□ 공 사 명 : 딜쿠샤 주변 정비공사

□ 공 사 비 : ******************************************

□ 공사기간 : **************************

□ 공사내용

진입로 개설, 자연석 석축 설치, 문화재 관리시설 설치

딜쿠샤 전면 잔디마당 조성, 도로 정비, 조경 공사 및 경계 담장 설치

기타 문화재 주변정비 및 부대공사 등

※ ‘전기공사업법’ 제11조에 따라 전기공사는 분리발주

※ 딜쿠샤 전면 전신주 및 통신주 지중화

배전선로 이설비(금13,918,660원)는 ’20.11. 한국전력공사에 납부 완료

시공사 선정 후 착공 전 한국전력공사 및 KT 등 유관기관 협의 예정

Ⅲ		발주계획

*******************

***************************************

*******************************************

**********************************************************************************************************

********************************************************************************************************

********************************************

*****************

*************************************************************

*************************************************************************************

*********************

***************************************************************************************

*******************************

***************************************************

*******************

**************************************

********************************

********************************

*********************************************************

******************************

****************************************************

********************

Ⅳ		행정사항

□ 공사 발주 및 계약 : 재무과

□ 소요예산 : ******************************************

예산과목 : 문화본부 역사문화재과, 역사문화유산의 계승 발전, 문화재 보존 복원, 국가지정문화재 보수, 시설비(401-01)

□ 향후계획

*******************************

******************

붙임  1. 설계설명서, 공사내역서 각 1부.

2. 공사시방서, 설계도면 각 1부(용량 초과로 별첨).  끝.