문서번호	박물관과-3690
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		代김소연	04/01 이성은
협조

『삼청각 별채 리모델링 공사』

설계변경 자문 실시계획

2021. 4.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 별채 리모델링 공사』

설계변경 자문 실시계획

삼청각 별채 리모델링 공사 중 시공자로부터 설계변경에 따른 계약금액 조정 요청이 접수되어 문화재‧건축‧적산 분야의 전문가 자문을 통하여 설계변경의 적정성을 확인코자 함.

□ 관련근거

○ 박물관과-245(2021.1.8.) 철거공사 실정보고 검토보고(1회)

○ 박물관과-814(2021.1.21.) 한옥 지붕공사 실정보고 검토보고(2회)

○ 박물관과-2928(2021.3.15.) 마감공사 실정보고 검토보고(3회)

○ 현강 제20*******01(2021.3.26.) 설계변경 승인요청

○ 이이케이 제*******260(2021.3.26.) 설계변경 검토의견 및 자문요청

□ 자문개요

○ 기    간 : 2021. 4. 1.(목) ~ 4. 7.(수)

○ 방    법 : 서면자문(검토자료 개별 송부 후 자문의견서 작성 의뢰)

※ 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 상향으로 비대면 서면자문 진행

○ 자문위원   ※ 서울시 도시기반시설본부 설계변경 자문위원회 소속위원

연번	분야	소 속	성 명	비 고
1	문화재수리	*********	***	************ ********
2	건축시공	**********	***	*************
3	건축적산	**********	***	*************************

○ 자문내용

- 한옥 지붕 수리 방법 선정 및 수량․단가 산출의 적정성

- 설계변경 사유의 적정성, 공법 변경의 적정성 및 경제성

- 신규단가 산정, 원가계산서 및 내역서 작성의 적정성

□ 소요예산 : *****

○ 산출내역

- 서면 자문수당 : 100천원 × 자문위원 3인 = 300천원

○ 예산과목 : **********************************************************

붙 임  1. (감리자)설계변경 검토의견서 1부.

2. (시공자)설계변경 자문요청서 1부.

3. 설계변경 자문 검토의견서(양식) 1부.  끝.