실정보고 검토서

공 사 명

반포천 유역 분리터널 건설공사

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 서초구 법원로 10

~ 사평대로 240일원

· 규    모 : 유역분리터널

(▣4.5×4.5~D7.1m,  연장 1,162m)

· 공사기간 : '18.2.1.~'22.3.31.

· 도 급 비 : 43,231백만원

· 시공사 : (주)호반산업외 1개사

· 건설사업관리 :

㈜도화엔지니어링외 2개사

· 설계사 : ㈜제일엔지니어링외

2개사

실정보고 건명

TBM터널 지보패턴 변경 및 붕락부 보강(5차) 실정보고-반포사관 제2021-135호(2021.03.31.)

실정보고

사    유

TBM 터널 종점부 현장여건(암질)이 설계와 다르며, 소규모 붕락부 발생

TBM 굴착 마무리 공사로, 내역서상 불필요한 공정 제외 및 일부 정산 시행

건설사업관리자

검  토  의  견

설계와 상이한 암반상태에 대해 암판정 결과를 반영하여 지보패턴 변경 및 붕락부 보강 시행

공  기  에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당 초	변 경	비 고(증·감)
규모	************** ************* **************** **************** ***************** ************* ***********	************** ************* **************** **************** ******************	*************** ************* **************** *************** ******************** *************** *************
공사비	************	************	**********

예산조치

계    획

당초 도급비 범위내 시행가능( ), 당초 사업비 범위내 시행가능(○) 별도(추가) 예산 확보 필요( )

추가 행정절차 이행 필요여부

없음

발 주 처

검토의견

암판정결과에 따라 터널 내 지보패턴 변경 및 붕락부 보강 사항을 승인하고 추후 설계에 반영하고자 함

비     고

결재

담당

김재건

과장

손창익

부장

04/01

박홍봉