문서번호	기전설비과-1975
결재일자	2021. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	시설부장		한강사업본부장
이균형	김상동	박상보		04/05 신용목
협 조
	총무과장		이상이
	기획예산과장		안인숙

한강공원 친환경 조명 설치공사 시행계획

2021.4

한강사업본부

(기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

한강공원 친환경 조명 설치공사 시행계획

한강공원내 민원발생 등 어두운 지역에 대하여 친환경 조명등을 설치하여 친환경 정책에 일조하고, 야간 경관을 밝고 아름답게 조성하여 한강공원을 찾는 시민들에게 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

Ⅰ		사업 추진개요

□ 사업개요

○ 사업위치 : 여의도, 난지 한강공원 산책로 (위치도 및 현황사진 별첨)

- 일조량이 양호하고 어두운 곳으로 안내센터 요청지역으로 선정

○ 사업규모 : 친환경(태양광) 가로등 40w 95등 설치

- 여의도 강변산책로(1,000m)      : 27등

- 난지   강변산책로(1,900m)      : 49등

- 난지   잔디마당주변 산책로(400m) : 9등

- 난지   중앙 연결 브릿지 (100m)  : 10등

※ 추진배경 : 시의원 발의사업

□ 발주계획

○ 공 사 명 : 한강공원 친환경조명시설 설치공사

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁 입찰

○ 공사기간 : 착공일로 부터  `21. 9. 30까지

○ 공 사 비 : ***************************************

※한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 조명시설 설치및운영,

시설비(401-01)

○ 입찰참가자격 : 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체로 주된 영업소가                     서울특별시에 소재한 업체

Ⅱ		관급자재 구매계획

□ 구매개요

○ 구매비용 :***********

○ 구매물품 : 가로등주 76본

태양광 가로등기구 95개

□ 구매계획

○ 가로등주

- 구매방법 : 조달 제3자 단가 (1억 미만 대상)

- 구매금액 : ********                               (단위 : 천원)

품 명	규격	수량	단 가	금 액
합 계				******
가로등주	철재 5m 2등용	**	***	******
가로등주	철재 8m 1등용	***	***	******
가로등주	철재 9m 1등용	***	***	******
조달수수료	0.54%	**		***

○ 태양광 가로등기구

- 구매방법 : 조달 다수공급자계약 2단계 경쟁구매 (1억이상 대상)

- 구매금액 : **********                           (단위 : 천원)

품 명	규격	수량	단 가	금 액
합 계				*******
태양광 가로등기구	LED 40w	***	*****	*******
조달수수료	0.54%	**		***

Ⅲ		향후계획

□ 추진일정

○ ’21. 4 : 공사발주

○ ’21. 4 : 공사계약 및 착공

○ ’21. 9 : 사업완료

□ 행정사항

○ 서울시설공단 사전설계도서 검토 및 감독의뢰

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 설계내역서 1부. 끝.