문서번호	한양도성도감-3193
결재일자	2021. 4. 2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화본부장
왕승찬	이원재	안중호		04/02 代백운석
협 조

공사기간 연장 검토보고(2차 계약분)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사)

2021. 4.

문  화  본  부

(한양도성도감

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

공사기간 연장 검토보고(2차 계약분)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관 조성공사)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관 조성공사」중 전시안내센터의 재설계 완료시까지 공사중단에 따른 공사기간을 연장하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 공사내용

· 성곽유구 보호시설 1,440㎡, 인포센터 280㎡, 관람데크 143m

· 유구 보존처리, 멸실구간 흔적 형상화 74m, 토목·배수공사, 조경공사

□ 계약개요

· 계 약 자: 원택건설㈜, 명헌건설㈜

· 계약금액: ￦2,905,883천원(총차 ￦4,036,442천원)

· 공사기간(1차):’18.11.19.~’20.6.19.(총차 ’18.11.19.~’21.4.8.)

□ 추진경위

· 2020. 6.19.   야외 유적전시관 준공접수

· 2020. 9.18.   전시안내센터 재설계 방침

한양도성 유적전시관 전시관리실 재설계 추진계획 보고와 관련한양도성도감-9507(2020.9.18.)

· 2020. 9.23.   전시안내센터 공사중단 요청(서울시 →시공자, 감리자)

· 2020. 11.2.   야외 유적전시관 시범개장

· 2020. 11.9.   전시안내센터 설계계약

· 2021. 3.18.   도시계획시설변경을 위한 열람공고중(15일간)

※ 향후계획: 푸른도시국 도시공원위원회심의, 문화재청 설계심사, 중구청 공용건축물 협의

Ⅱ		공기연장 사유 및 기간

□ 관련근거: 기획재정부 예규, 공사계약 일반조건 제26조(계약기간의 연장)

□ 준공기한 연기사유

- 전시안내센터(전시 및 관리실)를 재설계중에 있으나, 남산1근린공원조성계획(변경)결정을 위한 선행절차 이행에 상당기간이 소요되므로 설계도서 완료 시까지 공사착공이 불가하여 공사기간 연장이 필요함

※ 2021.5월말 설계완료후 2021.6월초 착공(추정)

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사 기간	1차	’18.11.19.~’20. 6.19.	-	준공
	총차	’18.11.19.~’21. 4.8.	’18.11.19.~’21. 12.15.	250일 연장 (공사중단기간 포함)

- 귀책소재: 서울시

(전시안내센터 재설계로 인한 공사요청: 2020.9.23.~ 설계완료 시 까지)

- 연장사유

· 전시안내센터 재설계를 위해 공사중단하였으므로 절대공기가 부족하여 공사기간을 연장함

※ 공사비 불용 방지를 위해 2021.12월내 완공예정

Ⅲ		처리의견

□ 전시안내센터 재설계를 위해 공사가 중단되고 있으나 금년내 공사완료를 목표로 절대공기 범위내에서 공기연장 계약을 하고자 함

붙임: 시공자의 공사기간 연장의견서 및 공사일정표(2021.12월 준공) 1부.  끝.