문서번호	한양도성도감-3192
결재일자	2021. 4. 2.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬	이원재	04/02 안중호

전시·안내센터 설계 용역기간 연장 검토보고

남산 회현자락 한양도성 유적전시관 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

문  화  본  부

(한양도성도감)

전시·안내센터 설계 용역기간 연장 검토보고

남산 회현자락 한양도성 유적전시관 -

한양도성 유적전시관중 “전시·안내센터”의 재설계중 공원계획의 변경절차(열람공고, 도시공원위원회 심의) 등의 이행을 위해 용역기간 연장을 검토하여 보고드림

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 한양도성 유적전시관 전시안내센터 설계용역

○ 용역기간 : 2020.11.9. ~ 2021.4.23.

○ 계약업체 : 아리건축사사무소*********

○ 계약금액 : 21,300,000원

○ 주요 과업내용

- 전시안내센터 설계

- 관련 법령에 따른 심의, 인허가 등 행정절차 이행을 위한 관계자료 작성 등

Ⅱ		추진경위

○ ’20. 11. 9.      설계용역 계약

○ ’20. 12.21.      설계진행 (착수)검토회의

○ ’21.  1.26.      설계진행 (중간)검토회의

○ ’21.  2.10.      공원조성계획 변경에 따른 관련부서 협의

결과: 행정2부시장 방침(2020.7.17.)에 따라 경미한 변경 아님

○ ’21.  3.18.      도시계획시설변경을 위한 열람공고중(15일간)

※ 향후계획: 푸른도시국 도시공원위원회심의, 문화재청 설계심사, 중구청 공용건축물 협의

Ⅲ		용역기간 연장 검토

○ 연장사유

- 남산1근린공원조성계획(변경)결정을 위한 선행절차 이행에 따른 필수 기간소요(도시계획시설변경을 위한 심의절차 이행 등)

○ 연장기간

구 분	변 경 전	변 경 후	비고
용역 기간	’20.11.9. ~ ’21.4.23.	’20.11.9. ~ ’21.6.4.	증 42일

○ 귀책사유: 서울특별시

○ 지체상금 부과여부: 미부과

Ⅳ		처리의견

○ 도시계획시설(남산1근린공원) 변경결정을 위한 선행절차 이행 지연에 따른 기간이 추가로 필요하게 되었으며,(선행절차 완료전 실시설계 진행 불가)

○ 남산1근린공원조성(변경)계획의 결정고시후 조성계획의 실행을 위한 협의와(공용건축물 협의, 문화재청 설계심사 등)관련법령 등에서 정한 절차 이행을 위해서는 용역기간 연장이 필요하며, 위의 절차 이행은 추가 용역내용이 아니므로 계약금액의 증감 없이 용역기간을 연장하고자 함

붙임: 용역기간 연장에 따른 합의각서 1부.  끝.