문서번호	기전설비과-2009
결재일자	2021. 4. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김효준		代이균형	04/06 박상보
협조

2021년 한강공원 승강기 유지관리용역 계약변경 검토보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

한강사업본부

(기전설비과)

2021년 한강공원

승강기 유지관리용역 계약변경 검토보고

「2021년 한강공원 승강기 유지관리 용역」과 관련하여 당초 계약대비 물량 변동사항에 대해 계약변경하여, 정산처리하고자 함.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 2021년 한강공원 승강기 유지관리 용역

□ 용역업체 : ****************

□ 계약금액 : 금131,490,000원

□ 계약기간 : 2021.1.1.~2021.12.31.

□ 용역내용 : 승강기 27개소 39대 점검·보수

□ 변경내용

□ 변경사유 : 승강기 단가부품 사용물량 추가에 따른 재료비 증액

□ 예산변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총용역비	131,490,000	148,856,880	증)17,366,880
승강기 정기점검	88,121,990	88,121,990	-
단가계약	35,889,371	50,079,832	증)14,190,461
일반관리비	1,435,575	2,003,193	증)567,618
이윤	770,679	1,787,013	증)1,030,000
부가세	11,953,636	13,532,437	증)1,578,801

□ 향후계획

□ ’21.4. 설계변경 의뢰 및 기성금(1차) 지급

붙임 :  1. 변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝