문서번호	기전과-3630
결재일자	2021. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이지영		04/07 배수웅
협조

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(1차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4. 7(수)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(1차) 계획 보고

우리사업소에서 관리하는 교통안전시설물 1구역(강남, 서초일부)의 유지관리 및 경찰청 규제사항 이행을 위하여 작업지시(1차)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		교통안전시설물 설치 현황

2021.01.01. 현재

구 분	교통신호기						비고
	신호제어기 (대)	신호지주 (본)	신호등 (조)	음향신호기(대)	잔여시간 표 시 기 (대)	보 행 자 작동신호기 (대)
계	721	5,220	11,386	2,806	2,878	106
강남구	239	1,755	3,888	922	924	28
(강남경찰서)	93	696	1,514	310	377	12
(수서경찰서)	146	1,059	2,374	612	547	16
서초구 일부	40	246	528	120	123	6

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용 : 강남구, 서초구일부 교통신호기 유지보수

□ 사업기간 : 2021. 3. 29. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜보원전기 대표 정혜원

□ 계약금액 : 금454,677,300원(금사억오천사백육십칠만칠천삼백원정)

□ 감리업체 : ㈜협우엔지니어링 대표 김영곤

Ⅲ		작업지시 계획

□ 작업착수 : 작업지시 1차

□ 작업기간 : 작업지시일로부터 ~ 2021. 6. 30.(수)

□ 작업지시 금액 : 금211,849,000(금이억일천일백팔십사만구천원정)

□ 작업지시 내역

연번	관련근거	작업위치	작업내용	비고
1	경정비 순찰	강남구 대치동 973-12 대	SKT 대치지점→고피자 방향 등 음향신호기 3대 교체	은마아파트입구
2	응답소 접수번호 20201215908290	강남구 역삼동 642-13 대	맨홀 1개 교체	역삼역
3	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.02.03.)	서초구 염곡동 73-2전	신호케이블 교체	염곡치안센터
4	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.02.19.)	강남구 압구정동 484천	IGR차단기 교체	성수대교남단램프
5	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.02.19.)	강남구 대치동 896-2 대	한중한의원→개나리푸르지오아파트 방향 음향신호기 1대 교체	도성초교사거리
6	교통운영과-283 (2021.1.7.)	강남구 삼성동 9-21	교통신호제어기 1대 교체	삼릉치안센터
7	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.02.19.)	강남구 역삼동 770-19 대	신호케이블 교체	우리은행역삼
8	경정비 순찰	서초구 내곡동 1-1486 임	차량신호등 1면 4색 1조 교체	헌인릉입구(연등)
9	경정비 순찰	강남구 삼성동 134-24 도	음향신호기 1대 교체	경기고교앞
10	강남구청 교통행정과 정연천	강남구 개포동 186-5 대	보행신호등 1면 3색 1조 교체	경기여고사거리
11	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.02.08.)	강남구 대치동 154-16 대	긴급출동	포스코사거리
12	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.03.04.)	서초구 내곡동 산13-194	잔여시간표시기 1조 교체	어린이병원
13	응답소 접수번호 202000922801894	강남구 도곡동 106-1 학	신호지주 1본 교체	도곡역(연등) 1
14	강남구청 교통행정과 김혜지	강남구 수서동 361-10도	경보지주 2본 교체	대진전자공고(경보)
15	강남구청 교통행정과-4511 (2021.03.11.)	강남구 신사동 592 대	신호지주 1본, 교통신호제어기 1대 교체	강남을지병원
16	강남구청 교통행정과-4511 (2021.03.11.)	강남구 역삼동 724 대	신호지주 2본 교체	(구)역삼세무서(연등)1
17	강남구청 교통행정과-4511 (2021.03.11.)	강남구 일원동 4-12 잡	신호지주 2본, 교통신호제어기 1대 교체	대청초교정문
18	강남구청 교통행정과-4511 (2021.03.11.)	강남구 일원동 4-44잡	신호지주 3본 교체	일원우체국
19	강남구청 교통행정과-4511 (2021.03.11.)	강남구 삼성동 111-114 도	교통신호제어기 1대 교체	논현동브라운스톤
20	강남구청 교통행정과-4511 (2021.03.11.)	강남구 논현동 78-6 대	교통신호제어기 1대 교체	학동역
21	경정비 순찰	강남구 일원동 4-30전	경보지주 1본 교체	일원에코파크(경보)
22	강남구청 뉴디자인과-10297 (2020.11.24.)	서초구 양재동 1271-4도	통합지주 1본 설치	국악고교앞
23	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.03.01.)	강남구 일원동 714 학	긴급출동	대모산입구
24	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.03.01.)	강남구 역삼동 777-7 대	긴급출동	도곡1동주민센터
25	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.03.01.)	강남구 삼성동 66-4 공	긴급출동	청담공원앞
26	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.03.09.)	강남구 역삼동 711-1 대	긴급출동	역삼119안전센터
27	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.03.12.)	강남구 수서동 산10-1임	전원선 교체	대왕중교
28	경정비순찰	강남구 삼성동 161-18 대	코엑스몰→ 글로벌비즈니스센터 방향 음향신호기 1대 교체	한전앞
29	경정비순찰	강남구 역삼동 923-4 대	휴대폰 도매직판점→롯데백화점 방향 등 음향신호기 2대 교체	한티역
30	경정비순찰	강남구 일원동 621 공	래미안 개포루체하임@→삼성약국 방향 등 음향신호기 3대 교체	삼성의료원앞

31	경정비순찰	강남구 개포동 140 대	도선여객→구룡산1노외주차장 방향 등 음향신호기 2대 교체	구룡마을입구
32	경정비순찰	강남구 수서동 733-4 도	수서부동산→신동아아파트 708동 음향신호기 1대 교체	궁마을삼거리
33	경정비순찰	강남구 대치동 670 대	동부센트레빌아파트 103동→대도초등학교 방향 음향신호기 1대 교체	대도초교
34	경정비순찰	강남구 대치동 142-36 대	KT플라자→위워크 방향 음향신호기 1대 교체	진선여교
35	경정비순찰	강남구 산39-2 임	강남리더스프라자→LH1단지아파트 방향 등 음향신호기 5대 교체	은곡마을
36	경정비순찰	강남구 세곡동 416-62대	물굽이근린공원→세천근린공원 방향 등 음향신호기 2대 교체	세곡보금자리삼거리
37	경정비순찰	서초구 양재동 421-4 도	스타벅스→도곡함춘산부인과의원 음향신호기 1대 교체	영동2교북단
38	경정비순찰	강남구 도곡동 179-1도	보석빌딩→포브라더스 도곡점 등 음향신호기 3대 교체	보석빌딩, 보석빌딩(연등)
39	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.03.09.)	강남구 청담동 139-25 도	청담리덴 동물치과병원→카페베네 방향 음향신호기 1대 교체	영동대교남단 교차로
40	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.03.20.)	강남구 압구정동 484천	보행자 작동신호기 APS보드 및 압버턴 교체	성수대교남단램프
41	강남구청 교통행정과-5504 (2021.03.26.)	강남구 도곡동 556 도	경보지주 1본 교체	도곡1동사무소(경보)
42	강남구청 교통행정과-5504 (2021.03.26.)	강남구 역삼동 757-1 공	신호지주 1본 교체	역삼중(연등)
43	강남구청 교통행정과-5504 (2021.03.26.)	강남구 압구정동 498 공	신호지주 2본 교체	한양치안센터
44	강남구청 교통행정과-5504 (2021.03.26.)	강남구 압구정동 497 공	신호지주 1본 교체	갤러리아압구정(연등)
45	교통관리과-18824 (2020.9.16.)	강남구 대치동 1011-59 도	차량신호등(1면 3색->1면 4색) 2조 교체	역삼영동아파트
46	교통관리과-23296 (2020.11.12.)	강남구 대치동 398	신호기(보)신설(잔여시간표시기 포함)	대치미도아파트
47	교통관리과-20754 (2020.10.14.)	강남수 수서동 707-4	경보등(종형) 신설	수서IC
48	교통관리과-20646 (2020.10.13.)	강남구 삼성동 3-1	신호기(보) 신설	삼성해청아파트

□ 작업완료보고서 제출기한 :2021. 6. 30.(수)

Ⅳ		행정사항

□ 작업지시 내용을『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』시공업체 및 감리업체에 발송하여 기한내 완료토록 지시

Ⅴ		보고자 의견

□ 시공물량은 작업완료 보고서에 따라 설계변경 및 정산처리

붙 임 : 1. 작업지시(1차) 설계서 1부.

2. 설계도면(별도) 1부.  끝.