코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	구리시장(균형개발과장)
(경유)
제목	과업중지 중지 요청에 따른 의견 조회 (태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계 용역)

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서 발주한「태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계 용역」과 관련 현재 구리시 구간의 실시설계 과업만 남아 있는 상태로서 타당성재조사, 총사업비 조정, 중앙투자심사 이후 설계과업 수행이 가능할 것으로 판단되는바

3. 사업시행 협약조건(2015.12.29.)에 따라 설계과업 중단 여부에 대해 귀 시 의견을 청취코자 하오니 조속 회신바랍니다.

붙  임 : 1. 과업중지 요청 공문 1부.

2. 사업시행 협약조건 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조중환		도로공간계획팀장	시희식		도로계획과장	04/07 代전기현
협조자
시행	도로계획과-4865	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 본관 11층 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8087	/전송	02-2133-0763	/	skkujo86@seoul.go.kr	/	부분공개(5)