문서번호	지식문화과-2936
결재일자	2021. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		지식문화과장	서울도서관장
이혜영		박정추	04/07 이정수
협 조
	주무관			김선국
	주무관			이승언

서울아트책보고 조성을 위한 기본구상 및 기본설계 용역(계약금액 변경)계획

2021. 4.

서울도서관

(지식문화과)

서울아트책보고 조성을 위한 기본구상 및 기본설계 용역(계약금액 변경)계획

서울아트책보고 조성 기본설계를 추진함에 있어 대상지의 낮고 불규칙한   천장의 특성을 극복 및 보완 하고자 대상지 천장 3D스캔 과업을 추가하여   계약을 변경(계약금액 변경)하고자 함

□ 용역개요

❍ 계 약 명 : 가칭)제2책보고 조성을 위한 기본구상 및 기본설계 용역

❍ 계약업체 : 근보양앤파트너스 건축사무소(주)(대표:유혜림)

❍ 계약금액 : 46,350,000원(금사천육백삼십오만원)

❍ 계약기간 : ’20. 11. 17. ~ ’21. 5. 31.

❍ 과업내용 : 고척스카이돔 지하1층 개보수(리모델링)를 위한 기본구상 및 기본설계

- 기본구상 : 대상지의 공간분석 및 디자인 기본방향 정립

- 기본설계 : 기능에 따른 공간구획 및 배치 계획안 구상

□ 용역 변경사항

*****************

**********************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************

***************************************************

***********************************************

*************************************

****************

************

*****************************************************************************************************

*********

***************************************************************************************

*************************************************

************************************************************

**************************

□ 향후계획

❍ 실시설계 용역    ’21. 6. ~ 9.

❍ 공사             ’21. 9. ~ ’22. 4.

❍ 사전개관         ’22. 4.

붙임  1. 계약변경 산출내역 1부.

2. 견적서 및 타견적 각 1부.

3. 과업추가 내용서(3D스캔) 1부.

4. 관련문서 각 1부.  끝.