문서번호	도로계획과-4915
결재일자	2021. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로공간계획팀장	도로계획과장
조중환	시희식	04/08 권완택

태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계

과업중지 검토 보고

2021. 4.

안전총괄실

(도로계획과)

태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계

과업중지 검토 보고

□ 개    요

○ 용 역 명 : 태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계

○ 규    모 : 폭 6→8차로(서울시 구간), 폭 4→6차로(구리시 구간)

연장 4.78km(서울 1.38km, 민자 1.77km, 구리 1.63km)

○ 용역기간 : (총차) 2016.11.14. ~ 2021.12.31.

(2차) 2017.07.01. ~ 2021.12.31.

○ 계약금액 : (총차) 2,736,096천원 / (2차) 1,859,128천원

○ 계 약 자 : ㈜유신 외 4개사

□ 그간 추진경위

○ ‘16.11.14. ; 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘17.12.22. : (서울시, 구리시 구간) 기본설계 완료

○ ‘18.12.31. : (서울시 구간) 실시설계 완료

○ ‘19.06.23. : 총사업비 조정(621억→2,023억) 요청(서울시→국토부)

- 구리시 구간 방음터널 설치, 광역상수도 이설 반영 등

○ ‘19.10.16. : 타당성재조사 결정(기재부)

- 타당성재조사 통과 후 총사업비 조정 등 행정절차 진행

○ ‘20.10.27. : 타당성재조사 중지 요청(서울시→기재부)

- 타당성재조사 중간점검(‘21.9.22.)에서 지적된 정책성분석 자료 보완 필요

○ ‘21.01.~04. : 정책석분석 자료 보완(‘21.4.5. 용역사 제출완료)

○ ‘21.04.07. : 과업중지 요청(용역사→서울시)

- 타당성재조사 및 총사업비 조정 이후 잔여 과업(구리시 구간 실시설계) 수행 가능하여 과업중지 요청

○ ‘21.04.08. : 과업중지 관련 구리시 의견회신(“과업중지 동의”)

□ 검토의견

○ 과업중지 기간 : 2021. 4. 6. ~ 2021. 10. 10. (188일간)

○ 중지 사유 : 총사업비 조정을 위해 한국개발연구원(KDI)에서 타당성재조사 수행 중으로써, 잔여과업(구리시 구간 실시설계) 착수 전까지 상당기간(약 6개월) 소요될 것으로 판단되어 과업 중지코자 함

붙  임 : 1. 과업중지 요청 공문 1부.

2. 구리시의견 1부.  끝.