문서번호	운영과-4519
결재일자	2021. 4. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
유재우		이도훈	04/08 최영효
협조
	주무관		현광욱

#3유입동 펌프장 천장크레인 수리(선조치)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

운영과

#3유입동 펌프장 천장크레인 수리(선조치)

#3유입동 노후 모터펌프(1~6호) 교체 공사 중 천장크레인의 미가동으로 인해 공사진행이 불가함. 공사 지연 시 각종 문제가 초래되기에 아래와 같이 선조치하였음.

□ 보고내용

○ #3유입동 노후 모터펌프(1~6호) 교체 공사 중 천장크레인이 트로리바 문제로

인하여 가동할 수 없기에 공사를 일시 중단하였음(‘21. 3. 15. 오전 9시경)

○ 기존 구매한 트로리바를 사용하여 천장크레인을 수리한 후 중단되었던 공사를 재개

※운영과-4262호(’21. 4. 2.) 관련

○ 현황사진

트로리바 교체 작업	펌프 교체공사 재개

□ 수리내용

○ 시공업체 : ********

○ 주요내역 : 고소작업차 및 지게차 동원, 고정자 등 부붐교체

○ 소요예산 : ***********************   *******

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 수처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,              수선유지교체비(소규모수선비)

붙임  1. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.