코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계)

1. 물재생시설과-4450(2021. 4. 9.)호와 관련입니다.

2.「중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한을   연기 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계

나. 계약번호(계약상대자) : 20200211B7E-01((주)이산)

다. 계약기간 변경(※ 계약금액 변동 없음)

구 분	당 초	변 경
기 간	2020. 2.20. ~ 2021. 4.19.	2020. 2.20. ~ 2021.10.31.

라. 지체상금 : 미부과

****************************************************

**************************

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부

3. 합의각서 1부. 끝.

							물재생시설과장
전문관							양해선			물재생기획팀장					조장환					물재생시설과장					04/09 윤창진
협조자				계약1팀장						원종순
시행			물재생시설과-4479									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)															/
전화		02)2133-3826						/전송			02)2133-1043					/													/	부분공개(5)