문서번호	지역공동체담당관-3569
결재일자	2021. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공동체공간조성팀장	지역공동체담당관
박성균		김준민	04/12 최순옥
협조

서초구 모두의공간 마을활력소 대상지 변경 추진계획

2021. 4.

서울민주주의위원회

(지역공동체담당관)

서초구 모두의공간 마을활력소 대상지 변경 추진계획

서초구 모두의공간 마을활력소 조성사업 관련하여 기존 대상지에 사업추진 어려워짐에 따른 대상지 변경 추진계획 검토 보고

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 서울특별시 마을공동체 활성화 지원 조례 제18조

○ 2021년 모두의 공간 마을활력소(매입형) 조성계획(`20. 6. 17.)

□ 추진경위

○ `19. 8. 30.~9. 25. : 예비선정단체 공모

○ `19. 10. 1.~10. 10. : 서류·현장·종합심사(매입형 6개단체 선정)

○ `19. 10.~`20. 4.	: 컨설팅 등 예비선정단체 간접지원

○ `20. 5. 26.	: 최종심사(매입형 함께크는 공동육아 외 1개단체 최종선정)

○ `20. 7. 16.	: 공유재산심의(심사결과 적정)

○ `20. 9. 17.	: 공유재산심의(감정평가액 관련 재심의, 심사결과 적정)

○ `20. 12월	: 예산편성

○ `21. 4월	: 대상지 변경신청(선정단체)

Ⅱ		변경개요

□ 대상지 변경

① 기존 대상지

○ 위    치 : ******************************

○ 현안사항 : 소유자가 매물을 거두어들임에 따라 대상지 변경 필요

② 변경 대상지

○ 위    치 : *********************************

○ 건물현황 : **********************************

○ 지적도 및 현장사진

*********************

□ 검토내용

************************************************

***************************************************************************

*******************************************************************************************

********************************************************************************

*****************************************

Ⅲ		추진계획

□ 조성계획

○ 조성방식 : 신축

- 기존 건물 매우 협소하며 사용연수가 40년 이상 경과하였으므로 신축 추진

○ 조성규모 : 지상1층~2층 (연면적 360㎡)

층 별	세부 시설용도	연면적(㎡)
계		360.00
2층	모두의 교실(방과 후 학교), 모두의 거실	180.00
1층	모두의 교실(어린이집), 모두의 부엌	180.00

□ 향후일정

○ `21. 4월	: 감정평가

○ `21. 5. 11.	: 공유재산심의(부지변경 등 관련)

○ `21. 6월	: 공유재관리계획(기준가격 : 3,028백만원)

○ `21. 7~8월	: 부지매입(추후 가액 협의하여 매입)

○ `21. 7~9월	: 공감워크숍(건축기획 포함)

○ `21. 10~`22. 2월 : 설계

○ `22. 3~	: 조성공사(약 8개월).  끝.