문서번호	환경수질과-3244
결재일자	2021. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
길인자		정갑평	04/12 이용우
협조

- 이촌수생식물 식재장 -

보수공사 공사기간 연장 검토보고

2021. 04.

한강사업본부

(환경수질과)

- 이촌 수생식물 식재장 -

보수공사 공사기간 연장 검토보고

**********************************************************************************************.

□ 추진근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 제22조(계약변경)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 8절(2.계약기간의 연장)

□ 추진현황

○ 계약개요

- 계 약 명: 이촌 수생식물 식재장 보수공사

- 계약금액: ************

- 계약업체: **************

- 계약일자: ‘21. 3. 29

- 계약기간: ’21. 3. 29. ~ ’21. 4. 13. (16일간)

○ 추진경위

- ’21. 4. 9. 공사기간 연장 요청********

□ 공사기간 연장 검토의견

○ 공사기간 연장 요청 사유

********************************************************************

○ 검토의견

**************************************************************************************

*****************************************

***********************************

□ 검토결과 : 공사기간 변경

구 분	계 약 변 경 내 용		비 고
계약금액	당 초	***********	변경없음
	변경후	***********
	증 액	*
계약기간	당 초	**************************	17일 연장 (지연배상금 없음)
	변경후	************************

□ 향후계획

○ 총무과 계약 변경의뢰 : ’21. 4. 12.

○ 이촌 수생식재장 보수 준공 :  ’21. 4.30

붙임  1. 공사기간 연장 요청서(합의각서) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 관련규정 1부.  끝.