투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	『2021년 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사』1차 작업 완료 보고

1. 우리 센터에서 시행 중인 「2021년 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가)」와 관련하여 작업완료보고서(1차)가 계약업체로부터 붙임과 같이 접수되었음을 보고합니다.

가. 공 사 명: 2021년 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가)

나. 계약기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

다. 금차 작업기간

․기존: 2021. 1. 27. ~ 2021. 2. 25.(30일)

․변경: 2021. 1. 27. ~ 협잡물종합처리기 모터 수리완료 후 20일 이내

라. 계 약 자: 한라기공(주) 대표 고원홍

마. 작업내용

- 농축기동 유량계 전원 및 분전반 설치(완료)

- 농축기동 탈취팬실 모터전원 및 등기구 교체(완료)

- 농축기동 지하공동구 등기구 누전부분 선로 교체(완료)

- 분뇨처리장 투입동 및 주변 노후등기구 교체(완료)

- 2처리장 주변 등기구 설치(완료)

- 분뇨처리장 협잡물종합처리기 동력 및 제어케이블 교체(미완료)

※ 사유(미완료)

→ 분뇨처리장 협잡물처리기 모터 수리 난항에 따른 지연으로 미완료 처리.

바. 조치계획

- 1차 작업지시 기간 도래로 완료 보고 후 다음 차수에 작업지시 실시

붙임  1. 공문 및 1차완료보고  1부.

2. 작업내역서 1부.  끝.

주무관	박영음		운영과장	04/14 최영효
협조자
시행	운영과-4768	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2523	/전송	02-2211-2599	/		/	부분공개(5)