문서번호	교량안전과-5730
결재일자	2021. 4. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
박경민		김귀용	04/09 한휘진
협 조

- 봉은교 정밀안전진단 용역 -

설계변경 시행계획 보고

2021. 4

교량안전과

- 봉은교 정밀안전진단 용역 -

설계변경 시행계획 보고

봉은교 정밀안전진단 용역 관련 자문비 실 정산에 따른 설계변경 및 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		용 역 개 요

용 역 명	용역 기간	용 역 사	용역비 (천원)	비 고
봉은교 정밀안전진단 용역	‘20. 3. 18. ∼ ‘21. 4. 25.	(재)한국재난연구원	*******

Ⅱ		설계변경 개요

□ 설계변경사유

○ 외부전문가 자문비 실 정산(당초 600,000원 ⇒ 변경 300,000원)

□ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
총 용 역 비	138,250,000	137,950,000	감) 300,000
공급가액	137,650,000	137,650,000	-
자문비	600,000	300,000	감) 300,000

Ⅲ		조 치 계 획

□ 재무과 변경계약 요청

붙 임 : 설계변경 내역서 및 합의각서 1부. 끝.