	서울특별시도시기반시설본부
수신자	설비부장
(경유)
제 목	준공기한연기체결통보[탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사(2차)〕

1. 설비부-4661(2021.04.08.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사(2차)

나. 변경사항 : 기간변동

다. 변경사유 : 선행공정(토목공사) 지연에 따른 후속공정 공사기간 부족

라. 변경계약 체결현황

구 분	당 초		변 경
	총차	2차	총차	2차
계 약 자	*************		****
계약금액	*************	*************	****		****
공사기한	**********	**********	**********		**********

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	심진경		재무과장	홍은미		총무부장	04/15 구본상
협조자
시행	총무부-6745	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 11층 도시기반시설본부 총무부(무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-2372	/전송	02-3708-2327	/	sjk1225@seoul.go.kr	/	부분공개(7)