문서번호	기전과-2947
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	04/15 변봉섭
협 조
	주무관			조소현

상도터널 노후 배전반 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4

남부도로사업소

(기  전  과)

상도터널 노후 배전반 교체계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 상도터널 노후 배전반 교체 계획을 수립하여 정전사고 방지등 안전사고 예방 에 만전를 기하고자 함.

1		사업 추진 개요

□ 추진근거

○ 2021년 도로기전시설물 유지관리계획(기전과-315, 2021.1.18.)

○ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정

□ 시설현황

위치	폭	연 장	높 이	배전반 수량	설치연도
상도동 516~ 본동 136	9.2m	568m	7.1m	조명반 3면 동력반 3면 계량기반 1면	2007

※ 내구연한 10년 경과

□ 사업기간 : 2021. 4. ~ 2021. 8.

□ 주요 사업내역

○ 조명반 3면 계량기반 1면 교체

○ 동력반 3면 중 예비 성격의 동력반 1면 철거

○ 동력반 2면은 상도터널 재연설비 설치 공사 시 교체 추진

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후전력설비 개량, 시설비

○ 위치도 및 관련사진

위 치 도	관련사진

2		사업추진 계획

□ 사업 추진계획

○ 설    계 : 자체설계(견적 활용)

○ 사업발주

- 배전반 : 조달계약(3자단가)

- 공  사 : 수의계약 추진

○ 사업기간 : 계약일로부터 120일 (‘20. 4. ~ 8.)

○ 사업예산 : *************************************

○ 예산과목 : 도로시설관리, 도로기전시설물관리, 도로시설물 노후 전력설비 개량, 시설비(상도터널 배전반)

3		사업추진 일정

○ 2021. 4.	자체 설계 완료

○ 2021. 4. 16	예산 재배정 요청(도로시설과)

○ 2021. 4. 21	배전반 구매발주(조달) 및 공사발주(수의계약)

○ 2021. 8	준공

붙임 : 1. 설계내역서  1부.

2. 도면 1부.

3. 배전반 제작 지침서 1부.  끝.