문서번호	시설보수과-3373
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(3 5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
송유진		04/15 오재영
협조
	주무관		권순회

- 남산1호터널 외 4개소 정밀안전점검 용역 -

착수보고회 개최 결과 보고

2021. 4. 15.

서부도로사업소

시 설 보 수 과

- 남산1호터널 외 4개소 정밀안전점검용역 -

착수보고회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 「시설물의 유지 및 안전관리에 관한 특별법」에 따라 시행중인‘남산1호터널 외 4개소 정밀안전점검용역’에 대한 착수보고회를 마치고 결과를 보고함.

1		용역개요

❍ 용 역 명: 남산1호터널 외 4개소 정밀안전점검용역

❍ 용역기간: 2021. 3. 24. ~ 11. 18. (240일간)

❍ 계약금액: 129,879천원

❍ 용 역 사: ㈜한국건설방재연구원 대표 김영미

❍ 대상시설 현황

시설물명	위 치	연 장(m)	폭(m)	준공년도	종별	비 고
남산1호터널	중구 예장동	3,062(2열)	9 ~ 10	1970/1994	1종
불광천복개2구간	마포구 상암동 541~543	374	6.8 ~ 16.0	1994	2종
봉원고가차도	서대문구 대신동 90	320	15	1979	2종
홍제교	서대문구 홍은동 48	71	24	1980	법정외
의주로지하차도	중구 순화동 207	250	16	1974	3종

2		착수보고회 개최 개요

❍ 일    시: 2021. 4. 15.(목) 15:00

❍ 장    소: 서부도로사업소 시설보수과 사무실

❍ 참 석 자: 5명

- 사업소 : 시설보수과장 외 2인

- 용역사 : 책임기술자 박정용 외 1명

❍ 보고내용

- 용역개요, 시설물 현황, 사전조사 및 전차보고서 분석 결과 보고

- 중점 점검사항, 평가계획, 추진일정 및 안전관리계획 등 보고

❍ 보고회 사진

3		주요 검토의견

❍ 과업수행 전반

- 과업수행계획을 준수하여 용역 수행토록 하며 공정보고 철저히 할 것

❍ 현장조사 및 시험부문

- 점검 중 긴급 보수가 필요한 사항은 즉시 보고하여 조치할 것

- 재료시험 시행 전 검교정 장비 투입계획 제출

- 탄산화, 염화물함유량, 반발경도, 철근탐사 등 시험위치 선정 기준과 사유를 명확히 하여 사전 시험계획 제출

- 시설물의 손상에 대한 단순한 보수방안이 아닌 내·외부 상태를 연계하여 근본적인 보수보강 방안을 제시하고, 그에 따른 적정 공사범위를 도식화하여 제출할 것

❍ 안전관리 부문

- 터널 점검시 터널 관리자와 비상연락망 항시 유지토록 하고 폭염 등으로 인한 점검자 건강관리에 유의하여 수행하기 바람

- 우천 예보 시 침수위험이 있는 시설의 조사를 절대 금지하고, 부득이한 경우 맨홀 및 출입구 위치를 사전에 파악하여 대피로를 확보하는 등 안전관리에 철저를 기하기 바람.

4		향후계획

❍ 2021. 4. ~ 7. : 외관조사 및 상태평가

❍ 2021. 7. ~ 8. : 중간보고회(현장조사 완료 시점)

❍ 2021. 10. : 자문회의 및 최종보고

❍ 2021. 11. 18. : 용역 준공

붙임  착수보고 자료 1부.  끝.