투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)서우건영 현장대리인 이후영
(경유)
제목	실정보고 승인 및 현장관리 철저

1.2021-이촌2동 현 006호(2021.4.6.)호의 실정보고건에 대하여 검토하고 아래와 같이 승인 하오니 안전 및 정밀시공에 철저를 기하여 주시고 변경 수량에 대하여는 추후 설게변경시 반영 하시기 바라며,

2.기초파일 시공시 철도 인접하여 시공함에 따라 장비전도등 안전사고가 발생치 않도로 지반상태확인 및 장비배치시 철도교량과 종단으로 배치시공을 검토하시기 바라며,

3. 봄철 기온상승으로 한강공원을 이용객이 급증 함에따라 따라 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 실정보고 검토회신 사항

실 정 보 고	회 신 내 용	비고
보행로 선형변경설치	실정보고대로승인
수목이식	실정보고대로승인(2.0*8.0m)
구조물 철거	실정보고대로승인

. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		기반시설과장	04/15 라철흠
협조자
시행	기반시설과-2553	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0674	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개