문서번호	토목부-7327
결재일자	2021. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	04/16 김용제
협조
	주무관		이상근

소규모 판석보수 수량정산 검토 보고

(세종대로 도로공간 재편사업 2구역)

2021. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

소규모 판석보수 수량정산 검토 보고

(세종대로 도로공간 재편사업 2구역)

공사 중 실시한 합동점검 시 보도확장구간 외 기존 보도구간에 균열, 패턴 불량 등 보수 지시에 따른 수량을 정산코자 검토 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 기존보도 소규모 판석보수 수량정산 실정보고 승인 요청 [세종수 제2021-169호(2021.4.14.)]

Ⅱ		공 사 개 요

○ 위    치 : 세종대로 사거리 ~ 서울역 교차로

○ 규    모 : 보행친화공간 재편사업 L=1.55㎞

○ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2021. 5.

○ 도 급 비 : 6,154백만원

○ 시공사 및 감리사 : 키움건설㈜ 외 2 / ㈜수성엔지니어링 외 1

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 공사 중***********************************************************************************************산하여 내역에 반영코자 함.

○ 판석 보수 위치***************

○ 보수 현황

위치	지적사진	지적사항
***	*	************************
************	*	*****************************
************	*	*****************************
************	*	**************************************************
*************	*	**************************************
*************	*	******************************

○ 수량 증·감 현황

공 종		단위	당 초	변 경	증 · 감	비고
***	******************	*	*	***	*******	****
***	***************	*	*	***	*******	****

***********************************

○ 공사비 증·감 현황                                     (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
직접공사비	*	*******	**************
제 경 비	*	*******	**************
계	*	*******	**************
관급자재	*	******	**************
총 공사비	*	*******	**************

Ⅳ		조 치 의 견

○ 건설사업관리기술인 보고 내용과 같이 소규모 판석보수 수량 정산 실정보고를 검토한 결과 타당한 것으로 판단되며 추후 설계변경 소위원회 심의 후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.