문서번호	도로관리과-6299
결재일자	2021. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
이병석		신준식	04/16 하현석
협 조
	주무관			양재신

자치구 위탁관리 도로시설물 설치 변경 계획

2021. 4.

도로안전시설팀

자치구 위탁관리 도로시설물 설치 변경 계획

송파구청 보행자 방호울타리 설치 추진 중 보행자 안전사고 위험이 시급한 지역에 추가 설치하여 보행자 안전에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 건    명 : 송파대로(석촌호수~장지역) 보행자 방호울타리 설치

송파대로 보행자 방호울타리 설치

○ 설치사유 : 차량이 보도 측으로 이탈 방지(보행자 안전 확보)

○ 공 사 비 : 830,000천원

□ 추진현황

○ ’21.01.25 : 자치구 위탁 방호울타리 예산 재배정(도로관리과 → 각 자치구)

- ’21년 송파구 방호울타리 예산 재배정 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		재 배 정 액			비 고
	계	당해년도	계	재배정액	집행액
**************************	*******	*******	*******	*******	*	*****
*****************	*******	*******	*******	*******	*	****** ****

□ 검토내용

○ 송파구청에서 ’21년 당초 2개『송파대로 석촌호수 ~ 장지역 방호울타리 설치』및

『송파대로 보행자 방호울타리 설치』사업 추진 중 현장조사 결과 보행자 안전

확보가 시급한 도로 구간이 발견되어 기존 사업구간 설치(400백만원)후 잔여 예산(430백만원)은 추가 발견 된『강동대로 등 3개 구간』에 반영하고자 함.

□ 조치계획

○ 기존『송파대로 석촌호수 ~ 장지역 방호울타리 설치』사업을 강동대로

보행자 방호울타리 설치사업으로 변경

○『송파대로 보행자 방호울타리 설치』사업은 백제고분로(아시아공원~송파나루역)

주변 및 양재대로 보행자 방호울타리 사업을 추가하여 설치

○ 송파구청(도로과)에 예산변경 승인 통보하여 조속히 사업추진

- 예산 재배정(조정) 변경 계획

(단위 : 천원)

연 번	당 초		변 경			비 고
	사 업 명	기 재배정액	사 업 명	요 청 액	금 회 조 정 액
		830,000			830,000	본 예산
1	************* ************	*******	************* ************	********	0
	-	0	********** ************	*******	*******
2	***** ************	*******	***** ************	********	*******	의 원 발의사업
	-	0	************* ************ **************	*******	*******
	-	0	*********** ********	*******	*******

- 예산과목 : 도로 및 도로 부속물 관리, 자치구위탁관리 도로시설물 보수‧보강, 시설비

□ 향후 추진계획

○ 2021. 4. : 공사 발주(송파구청)

○ 2021. 7.  : 공사 완료

《붙 임》 : 송파구 도로부속물(방호울타리)예산 변경사용 요청공문 1부.  끝.