문서번호	자전거정책과-4697
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		자전거도로사업팀장	자전거정책과장
정재훈		윤장혁	04/20 서병철
협조
	주무관		정삼기

- 청계천로 도심순환형 자전거 간선도로망 구축을 위한 -

공사기간 산정 적정성 자문회의 결과 보고

2020. 04.

도로교통실

(자전거정책과)

- 청계천로 도심순환형 자전거 간선도로망 구축을 위한 -

공사기간 산정 적정성 자문회의 결과 보고

청계천로 도심순환형 자전거전용도로 구축 관련하여 공사기간 산정(단축)에 대한 시공전문가 자문회의를 개최 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 건설기술 진흥법 시행령 제71조 제4항

○ 자방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75조의2

○ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토부훈령 제1140호)

□ 자문개요

○ 일   시 : 2020. 4. 14.(화) 16:30 ∼

○ 장   소 : 서소문청사 1동 8층 물순환안전국 공용회의실

○ 참   석

- (내부) : 자전거정책과장, 자전거도로사업팀장 외 2명

도시기반시설본부 토목부 담당자

**********************************

********************************

************************************

********************************************

□ 자문안건

○ 공사기간 산정결과의 적정성과 대안의 비교 검토

○ 추가적으로 공사기간 단축 가능한 방안 마련

□ 자문결과

○ 제시된 공정에 빠져있는 사항에 대한 추가 반영 필요

- 청계천 하부 하천 측으로 작업용 가설비계 설치기간 미 고려

- 보행데크 설치를 위한 고정 콘크리트 양생기간 미 고려

○ 단축 공사기간 산정 시 공사비 증액 검토 필요

- 단축공사 시 인건비 할증으로 인해 공사비가 상당히 증가될 가능성

○ 단축 공사기간 산정 시 13개팀 운영에 따른 동시작업은 현실적으로 곤란

- 도급하한액 200억원 이하 사업으로 3군이하 업체 수주가 예상되며 영세업체의 복수 공사팀 공정관리능력 한계 예상

- 13개팀 운영에 필요한 장비·자재·인력 안정적 수급 불확실

○ 기상변화, 민원 등 예기치 못한 돌발변수에 대한 충분한 검토 필요

- 청계천 전 구간 동시다발적 공사로 인한 소음·분진 등에 대한 민원 예상

- 청계천은 도심지내 특수한 공간으로 환경민원 발생 시 사업지연 가능

※ 과거 청계천 복원공사 시 환경민원 발생으로 6개월 지연된 사례가 있음

⇒ 10월 행사추진이 가능토록 데크설치 제외 등 구상변경 검토 보고(4.16)

<시공전문가 자문회의 개최 사진 >

******

붙 임 : 1. 자문위원 참석 1부.

2. 자문의견서 각 1부.  끝.