문서번호	토목과-5427
결재일자	2021.4.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장 직무대리
서재관		임정규		김영훈		04/20 최연우
협조

★ ◉

- 연무장길 야간경관조명 설치 공사 -

준공기한 연기 검토 보고

2021. 4.

(토목과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 연무장길 야간경관조명 설치 공사 -

준공기한 연기 검토 보고

g

『연무장길 야간경관조명 설치 공사』관련하여 동절기 굴착통제 등으로 인하여 공사 수행기간이 부족하여 준공기한을 연장하고자 함.

1		공사 개요

○ 공 사 명: 연무장길 야간경관조명 설치 공사

○ 공사개요: 보행로 디자인 열주 28본, 교차로 디자인 열주 10본, 게이트 디자인 열주 4본

○ 공사기간: 2020.12.23. ~ 2021.04.30.

○ 공 사 비: 금202,467,790원

○ 공사업체: 지성엔지니어링  대표 김창덕

2		준공기한 연기 사유

○ 동절기 굴착통제 등으로 인하여 공사 수행기간 부족

- 토목공사 준공기한: `21.04.30.→ `21.08.31.[토목과-5132호(2021.04.13.)]

3		조치 계획

○ 준공기한 : 당초 2021.04.30. → 변경: 2021.08.31.

○ 연기사유 귀책소재: 성동구

○ 지체상금 부과여부: 미부과.  끝.